문서번호	생태공원과-810
결재일자	2015.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
서은교		최병언	04/01 장상규
협조
	주무관		김봉선

『양화한강공원 친수공간 조성공사(2차)』

실정보고사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

한강사업본부

(생태공원과)

『양화한강공원 친수공간 조성공사(2차)』

실정보고사항 검토 보고

『양화한강공원 친수공간 조성공사(2차)』시행중 공사감독부서인 시설관리공단의 실정검토 사항에 대하여 검토결과를 보고드림.

⇒ 공사감독3처-2518(2015.3.27)

공사개요

공 사 명 : 양화한강공원 친수공간 조성공사(2차)

공사기간 : '14.4.15.~'15.4.15.(총차 '13.12.27~'15.4.15)

도 급 비 : 금차 575,853천원(총차 3,352,552천원)

도 급 자 : 태흥개발(주) 대표 신현종, 정나라건설(주) 대표 이완규

실정보고사항 검토결과

실정보고 검토내용(토목)

공종별	실정보고사항(발주청요청)	공단검토 내용	검토결과
토공 / 포장공	▶ 민원사항으로 주차장내 차량회전 가능토록 주차선 정리 및 삭제 요청 [본부장 현장지시 (3.16)]	▶ 현장여건에 맞게 불필요한 주차선이 표시된 고압블럭 재포장, 차선도색은 융착식에서 상온식으로 변경시행 - 보도블럭걷기(인력,재활용) : 0 → 336㎡ - 차선도색(백색,실선) : 606.3 → 50.6㎡(자전거 도로) - 차선도색(백색,실선,융착⇒상온식) : 0 → 686.4㎡ - 소형고압블럭(t=80,파손블록교체) : 0 → 201㎡ - 소형고압블럭(재활용)(t=80,파손블록교체) : 0 → 135㎡ - 레미콘(25-18-08,사급) : 0 → 12.96㎥ (※ 소량으로 사급처리)	실정보고 내용반영 감)16,436 천원
부대공	▶ 주차요금소앞 주차장 진출입차량과 자전거도로 교차부의 안전사고 예방 위한 안전시설 추가설치 요청	▶ 현장여건에 맞게 LED교통표지판 추가 설치 - LED 교통표지판 설치 : 0 → 2개소

공종별	실정보고사항(현장회의)	공단검토 내용	검토결과
배수공	▶ 공사계획평면도의 No.5~No.6 및 No.7 물놀이장 입구에 별도의 배수시설 없어 우천시 표면수가 물놀이장으로 유입될 수 있어 배수시설 보완	▶ 현장여건에 맞게 배수시설 보완 설치 - 터파기(기계90%+인력10%) : 0 → 89.92 ㎥ - 되메우기(기계90%+인력10%+콤팩터) : 0 → 85.34㎥ - 잔토처리(백호0.7㎥): 0 → 4.58㎥ - PE이중벽관(Ø300mm): 0 → 4.2m - PE이중벽관(Ø150mm): 0 → 20.2m - 집수정(기성품)(900x900): 0 → 1개소 - U형측구(300x300x120,기성품,설치품) : 0 → 5본 - 배수트랜치(B=150mm): 0 → 6m - 무소음그레이팅(395×995×4T) : 0 → 10조 - U형측구(300x300x120,사급자재) : 0 → 5본	실정보고 내용반영 증) 4,057 천원
	▶ 물놀이장 주변 집수정이 당초 설계된 스틸그레이팅으로 되어 있어 미관저해와 발가락 끼임 등 안전사고 우려	▶ 현장에 맞게 디자인그레이팅으로 교체 시공 - 디자인그레이팅(700×700×50) : 0 → 2개소
	▶ 제3주차장 주차요금소 입구에 노후된 스틸그레이팅을 무소음그레이팅으로 교체	▶ 현장에 맞게 무소음그레이팅으로 교체 - 무소음그레이팅(395×995×4T) : 0 → 27조 (10 +17조)
부대공	▶ 한강랜드앞 사석사면 상부 및 매표소 진입로주변 단차부에 안전시설물이 없어 안전사고 발생우려로 안전휀스(STS) 보완설치	▶ 기존휀스와 연결되도록 안전휀스 설치 - 휀스설치(단차부, STS H=1.2m,L=2m) : 0 → 1개소 - 휀스설치(단차부, STS H=1.3m,L=8.5m) : 0 → 1개소
	▶ 남부수도사업소에서 퇴수변 토출구로 동물 및 사람출입으로 인한 안전사고방지 를 위한 안전망(STS) 설치	▶ 예비준공검사 요청사항 및 현장에 맞게 안전망(STS) 설치 - 퇴수부 안전망설치(STS,D=16mm) : 0 → 1개소
	▶ 주차장 입구에서 철거된 양호한 볼라드 재사용	▶ 현장에 맞게 볼라드 재사용 수량 조정 - 볼라드 설치 : 51 → 35개소 - 볼라드 재설치 : 0 → 7개소
구조물공	▶ 물놀이장에 설치된 디자인그레이팅 표면이 미끄러워 이용객의 안전사고 발생이 우려로 보완 필요	▶ 디자인그레이팅 상부에 논슬립기능 추가 시공 - 수용성에폭시페인트(T=1.3mm,규사포설) : 0 → 32.62㎡

공종별	현황 및 문제점	공단검토 내용	검토결과
토공 / 포장공	▶ 이동식 정수처리시설 운반차량 진입시 주차장에 존치된 기존화단 1개소 저촉	▶ 기존화단을 철거하고 포장복구 시행 - 콘크리트포장깨기(기계) : 0 → 1.02㎥ - 보차도 경계석 걷기 : 0 → 22.4m - 폐기물처리(백호0.7㎥상차) : 0.5 → 13.16㎥	실정보고 내용반영 감)14,193천원
구조물공	▶ 물놀이장과 U형측구 연결부 신축이음부분에 레진몰탈이 일체로 설계되어 온도변화로 인한 신축발생시 균열 예상	▶ 현장에 맞게 신축이음부 레진몰탈을 잘라내고 바닥줄눈 추가 설치 - 바닥줄눈 설치 : 0 → 64m
주차장 사용료 반환	▶ 주차장 점용면수 및 일수 변경에 따른 주차장 사용료 반환금액 정산	▶ 시공사 및 주차장운영사 (주)다래파크텍과 사용일수 확인하여 정산 ․ 총점용면수 및 일수 : 154면, 185일 ․ 주차면 증가면수 및 일수 : 47면, 102일 ․ 반환금(=점유분-증가분) - 정산 17,488,800 → 2,830,132원
이용자의 관점에서 보는 안전점검	▶ 공단 감독자들과 이용자의 관점에서 안전점검(3.19) 시행결과 수위조절 탱크실주변 및 샤워장 주변으로 추락․ 미끄러짐 등의 안전사고 발생이 우려됨 ▶ 쉼터데크와 물놀이장 사이 단차부는 어린아이들이 걸려 넘어지거나 실족의 우려가 있음	▶ 수위조절탱크실 주변을 휀스로 차단하고 출입문을 설치하여 물놀이장 가동시 수시로 수위체크를 가능하게 하고, 샤워장 주변은 기존휀스(조경공사분)를 연장하여 시행 ▶ 쉼터데크와 물놀이장 사이의 계단을 연장하여 최대한 단차를 줄여 시행 ▶ 기타 모서리 및 포장 단차부, 녹지대에 묻힌 전기맨홀 등은 도급사에 보완시공 ※ 보고서 별첨	실정보고 내용반영
정산	▶ 1차분 준공내역중 과지급분에 대한 정산 - 물놀이장 구조물 설치시 미시행한 터파기 및 잔토공종 - 소형고압블록 재사용수량 반영 및 물량 재정산 - 블록포장하부 콘크리트 설치품 정정(콘크리트 타설→포설) - 상수도 제수변실 단가 조정 (원형 → 중형) - 현장대리인 보험료 감액정산	▶ 2차분 최종 설계변경시 정산반영 ※ 보고서 별첨	실정보고 내용반영 감)26,103천원

실정보고 검토내용(조경)

공종별	현황 및 문제점	공단검토 내용	검토결과
식재 공사	□ 경관 향상을 위하여 녹지대를 고려한 식재 조정	□ 경관 향상 및 식재지 면적을 고려한 식재물량 조정 - 좀작살나무 등 4종 4,450주 → 1,950주	실정보고 내용반영 증)11,385천원
	□ 목재 데크 측면 하부가 노출되어 경관 불량	□ 데크 측면 차폐식재 - 회양목 추가 식재(2,800주 → 4,100주)
시설물	□ 물놀이장과 저수호안사면 경계 휀스 미설치 구간 안전사고 우려	□ 안전휀스 연장(추가) 설치 - 안전휀스 30경간 증
	□ 물놀이장 내 버드나무 식재공간에 물놀이장 물 유입에 따른 생육불량 우려	□ 수목 생육 및 이용자 편의를 고려하여 원형 앉음벽 설치 - 수목보호틀 → 원형앉음벽 교체
	□ 수심안내판 중복에 따른 일부 제외	□ 수심안내판 일부 제외(축소) - 5개소 → 3개소
화장실	□ 화장실 외부 바닥재(합성목재) 유지관리가 어려움	□ 합성목재를 물놀이장 내 데크제와 동일(이페)한 목재로 변경
	□ 화장실 진입계단의 단높이가 0.3m로 어린이 등 이용불편 및 안전사고 우려	□ 단높이를 0.15m로 낮추고 램프 등 이용 편의 증진
	□ 화장실 난간 횡대(와이어)가 어린이 등 어린이 등 이용불편 및 안전사고 우려	□ 횡대(와이어)는 원형봉강으로 변경
	□ 화장실 내부타일에 미끄럼 방지 기능 누락	□ 화장실 내부 타일 디자인 및 재질 변경

개략공사비 변경내용

총차 공사비 증감 : 감 41,293천원

(단위:천원)

구 분	당초금액 (도급금액)	변경금액			증 감	비고
		전회	금회(증감)	누계
합 계	3,352,552		-41,293	3,311,259	-41,293
제 경 비	919,923		-25,173	894,750	-25,173
순공사비	2,432,629		-16,120	2,416,509	-16,120

2차 공사비 증감 : 감 41,293천원

(단위:천원)

구 분	당초금액 (도급금액)	변경금액			증 감	비고
		전회	금회(증감)	누계
합 계	575,853		-41,293	534,560	-41,293
제 경 비	186,016		-25,173	160,843	-25,173
순공사비	389,837		-16,120	373,717	-16,120

보고자 의견

실정보고사항 검토결과 그 내용이 타당하므로 공사감독부서로 실정검토내용과 같이 승인 통보하고 추후 설계변경시 물량 증·감 사항에 대해 정산처리하고자 함.

붙 임 : 시설관리공단 실정보고 관련문서 1부.  끝.