문서번호	교량안전과-5319
결재일자	2015.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량기획팀장	교량안전과장
이회진		하현석	04/01 이용심
협조

2015년 한강교량 보수공사 건설폐기물처리 용역 발주계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

도시안전본부

교량안전과

2015년 한강교량 보수공사

건설폐기물처리 용역 발주계획 보고

2015년 한강교량 보수공사에서 발생되는 건설폐기물을 신속하고 효율적

으로 처리하기 위한 건설폐기물처리 용역 발주계획을 수립하여 보고 드림

Ⅰ		사업현황

2015년 한강교량 보수공사 사업 현황

구 분	공 사 명	사업비 (백만원)	위 치	추진현황(계획)
소 계		9,319
연간단가	한강교량일상유지보수(1공구)	2,760	구리암사대교 ~ 반포대교	‘15.3.26 계약 ‘15.3.30 착공
	한강교량일상유지보수(2공구)	2,760	동작대교 ~ 행주대교	‘15.3.31 계약/착공
단일공사	성수대교 보수공사	745	성동구 성수동 ~ 강남구 압구정동	‘15.4월 중 계약심사/발주
	광진교 보수공사	1,545	광진구 광장동 ~ 강동구 천호동	‘15.4월 중 ․ 교면포장기술위원회 ․ 계약심사 / 발주
	잠실철교(도로교) 보수공사	509	광진구 구의동 ~ 송파구 신천동	‘15.3.27 계약심사요청 ‘15.4월 중 발주
	성산대교 보수공사	1,000	마포구 망원동 ~ 영등포구 양평동	‘15.4월 중 ․ 교면포장기술위원회 ․ 계약심사 / 발주

Ⅱ		폐기물처리 용역 발주계획

추진방향

폐기물의 신속한 처리와 사업의 효율적 추진을 위해 통합 발주

개   요

○ 용 역 명 : 2015년 한강교량 보수공사 건설폐기물 처리 용역

○ 용역기간 : 2015.4 ~ 2015.12.31

○ 용 역 비 : 98,615천원

폐기물처리 예정 물량

공 사 명	폐기물 처리비 (천원)	건설폐기물(톤)				비 고
		총 계	콘크리트	아스콘	혼합폐기물
합 계	98,615	5,350	260	4,660	430
한강교량일상유지보수(1공구)	19,283	1,395	100	1,190	105
한강교량일상유지보수(2공구)	19,283	1,395	100	1,190	105
성수대교 보수공사	12,397	690	30	600	60
광진교 보수공사	33,517	1,870	30	1,680	160
성산대교 보수공사	14,135	770	55	650	65

※ 잠실철교 보수공사는 건설폐기물 처리물량 100톤 미만으로 자체처리

관련근거 : 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률시행령 제11조〕

운반거리 및 폐기물 처리비

■ 운반거리 산정

○ 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)는 동작대교 중심으로 인근지역

폐기물업체 평균거리 산정

○ 단일공사는 각 교량별 인근지역 폐기물업체 평균거리를 산정

○ 전체 사업구간의 평균거리인 30km를 운반거리로 적용

연 번	구 분	사업별 운반거리(km)					평 균 운반거리	비 고
		한강교량 일상유지	성수 대교	광진교	잠실 철교	성산 대교
적용 운반거리							29.8
1	세창환경건설㈜	18.3	25	36.4	38	23.9	28.3	경기남부
2	서울N.E.T㈜	19	24.5	33.8	32.4	8.9	23.7	경기서부
3	㈜도성환경개발	39.3	31.3	23.7	25.8	39.1	31.8	경기동부
4	도시환경산업㈜	38.9	30.1	33.8	35.8	38.5	35.4	경기북부

※ 운반거리는 건설폐기물업체가 선정되면 실제거리로 환산 적용하되

운반거리 30km 이상은 계약단가로 적용

■ 폐기물 처리비

○ 처리비는 2015년 시장조사 가격 중 최저가로 적용

폐기물처리비 시장조사 가격
연번	업체명	폐콘크리트	폐아스콘	혼합폐기물 (소각5%미만)	비 고
	적 용	12,000	12,500	40,000	부가세,상차비,운반비 별도
	최저가	12,000	12,500	40,000
1	㈜신잔토환경	6,000	17,000	58,000
2	㈜대흥에코	18,000	19,000	74,000
3	청한공영㈜	12,000	12,500	65,500
4	㈜명한종합환경	14,200	15,500	53,000
5	㈜유진개발	17,000	18,000	70,000
6	인선이엔티㈜	18,200	19,800	40,000

○ 폐아스콘 중 평삭재는 서울특별시 순환골재 등의 활용촉진에 관한 규정(훈령 제963호)에 의거 재생아스팔트로 사용함에 따라 운반비만 지급하고 처리비용은 무대로 처리

○ 교면포장 절삭시 방수재가 혼합된 폐아스콘은 일반 건설폐기물로 처리가 불가능한 바 절삭물량의 10%를 혼합폐기물로 반영하여 처리비 정산

■ 사업별 예산과목

○ 2015 한강교량 일상유지 보수공사(연간단가)-1공구 (19,283백만원)

교량관리, 한강교량관리, 한강교량 일상유지 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 2015 한강교량 일상유지 보수공사(연간단가)-2공구 (19,283백만원)

교량관리, 한강교량관리, 한강교량 일상유지 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 성수대교 보수공사 (12,397백만원)

교량관리, 한강교량관리, 성수대교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 광진교 보수공사 (33,517백만원)

교량관리, 한강교량관리, 광진교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 성산대교 보수공사 (14,135백만원)

교량관리, 한강교량관리, 성산대교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

※ 각 공사에서 발생되는 건설폐기물은 공사 담당자 확인(추산)후 사업별

예산으로 정산

Ⅲ		향 후 계 획

○ ’15.  4 : 건설폐기물 처리용역 발주 / 계약

○ ’15.  5 : 착수

○ ’15. 12 : 용역 준공.