문서번호	시설과-2322
결재일자	2015.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
남상국		이종한	04/02 이용태
협조

장충단공원 내 어린이놀이터 설치공사

현장 실정 사항 검토보고

2015. 4

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

장충단공원 내 어린이놀이터 설치공사

현장 실정 사항 검토보고

장충단공원 내 어린이놀이터 설치공사의 도급업체로부터 제출된 현장 실정

사항을 검토하고 결과를 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 장충단공원 내 어린이놀이터 설치공사

○ 위    치 : 중구 장충동 2가 197번지 일대(장충단공원)

○ 공사기간 : 2014. 12. 18 ∼ 2015. 4. 16

○ 도 급 액 : 73,713,000원

○ 도 급 자 : (주)이레녹화 대표 양명준

□ 검토내용

구 분	현황 및 문제점	조치의견	비 고
포장공	▶ 조합놀이대 모래막이시설 설치 지역내 지장물로 인한 선형 조정에 따른 물량 변경 ▶ 진입로 디딤석 포장재료가 산책로 흙포장과 어울리지 않아 재료 변경 필요	▶ 현장여건에 맞게 물량 변경 - 방부목경계 : 62m → 69m(증 7m) - 모래포설 : 191㎥ → 224㎥(증 33㎡) ▶ 기존 산책로 흙포장과 동일 재료로 포장재료 변경 - 디심석 포장 10㎡ → 흙콘크리트 포장 15㎡로 변경(증 5㎡)
우배수공	▶ 집수정 설치 위치의 지형이 높아 구배가 맞지 않아 기존 집수정 활용 변경 필요	▶ 현장여건에 맞게 배수체계 변경 - 빗물받이 : 1개 → 0개 (감 1개) - 우 수 관 : 11m → 0m (감 11m)

구 분	현황 및 문제점	조치의견	비 고
식재공	▶ 모래막이 선형 조정에 따른 이식물량 및 추가 식재 부분 발생 ▶ 선형변경에 따른 나지발생으로 관목식재 불가피함	▶ 현장여건에 맞게 이식물량 변경 - 때죽나무 : 0주 → 3주(증 3주) - 산철쭉 : 1700주 → 0주(감 1700주) ▶ 놀이터 주변 나지부분 관목 추가 식재 - 조팝나무 : 0주 → 300주 (증 300주) - 산 철 쭉 : 0주 → 650주 (증 650주)

□ 제경비 정산

구 분	정산내역	비고
제경비	▶ 건강, 연금, 노인장기요양 보험료 등 정산 - 건강보험료 : 339,973원 → 0원 - 연금보험료 : 497,960원 → 0원 - 노인장기요양 보험료 : 22,268원 → 0원 - 건설기계대여금지급보증서발급 : 67,034원 → 0원 - 환경보전비 :154,695원 → 0원

□ 계략 공사비

구 분		소요금액 (개략공사비)
		당 초	변 경	증 /감
총공사비		128,764,000	128,764,000
도급비	공급가액	67,011,820	67,011,820
	부가가치세	6,701,180	6,701,180
	계	73,713,000	73,713,000
관급자재비		55,051,000	55,051,000

□ 검토의견

○ 당초 설계된 내용에서 조합놀이대 설치지역 내 지장물로 인해 모래막이 선형조정 사유 발생에 따른 시공중 실정보고 사항으로 현 실정에 맞게 검토된 사항을 시공사에 통보 변경 시공토록 조치하고 향후 설계변경에 반영 코자 함.

첨 부 : 실정 사항 검토 공문 1부.  끝.