문서번호	시설관리과-6365
결재일자	2015.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
서장원		손종백	전결 04/02 이자원
협조

·

기   성   보   고   서

(2014년 강서구 관내 시설물 설치 및 보수공사(장기계속공사)-4차)

2015. 4. 2(목)

강서수도사업소

(시설관리과)

명에 의하여 『2014년 강서구 관내 시설물 설치 및 보수공사(장기계속)』와 관련, 기성금 신청(4차) 현황을 아래와 같이 보고합니다.

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2014년 강서구 관내 시설물 설치 및 보수공사(장기계속공사)

나. 착 공 일 : 2014.04.02

다. 준공기한 : 2015.03.31

라. 도 급 액 : 484,280,000원

마. 도 급 자 : 나일건설  대표 : 이 춘 화

2. 기성금 신청현황

가. 위    치 : 강서구 방화동 650-52번지외 90건

나. 금회공사기간 : 2014. 12. 11. ~ 2015. 3. 25

다. 기성 금액(4차) : 107,680,000원

3. 기성 내역

가. 기성내역

(단위: 원)

구 분	계 약 금 액	전회까지 기성금액(1차)	금회 기성금액 (2차)	기성 합계	비 고
도 급 액	484,280,000	376,600,000 (77.8%)	107,680,000 (22.2%)	484,280,000 (100%)	-

- 전회까지 기성금액 현황

(단위: 원)

구 분	합 계	1차 기성금액	2차 기성금액	3차 기성금액
도 급 액	376,600,000	123,100,000	98,400,000	155,100,000

나. 예산과목별 지출액

(단위: 원)

구 분	정산금액	구분 확인제 지출액(기 지출액)	금회(정산)지출액	비고
합 계	107,680,000	9,669,000	98,011,000
시설비(노후밸브정비)	66,100,000	9,669,000	56,431,000	노무비 (‘15/2월분)
소방용수 설치 및 보수	41,580,000	-	41,580,000

다. 공사개요

(단위:개소)

계	노후밸브정비	변실정비	철개교체	사다리설치	소화전보수
91	18	13	12	22	26

4. 처리 의견

○ 상기와 같이 2014년 강서구 관내 시설물 설치 및 보수공사 기성(4차)을 시행코자

합니다.

붙임 : 1) 기성내역서(4차) 1부.

2) 구분확인제 지출현황 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원 ☎3146-3990 시설물총괄 : 손종백 ☎3146-3994 담당 :서장원☎3146-4005