함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	4차 기성 시행(강서구 관내 시설물 설치 및 보수공사)

우리사업소에서 시행한 『2014년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사 (장기계속단가)』에 대하여 아래와 같이 4차 기성을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 강서구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)

나. 공사기간 : 2014. 4. 2. ~ 2015. 3. 31.

다. 도 급 자 : 나일건설,  대표 이 춘 화

라. 예산과목 : 자본적지출, 가동설지자산, 구축물, 시설비(노후밸브정비)

상수도사업비, 영업비, 배급수비, 기타교체비(가압장배수지 유지보수)

소방용수시설 등의 설치 및 관리, 소방용수시설 설치 및 보수

마. 준공 및 기성내역                                          (단위 : 원)

구 분	기 성 내 역				비고
	계약금액	전회까지 누계금액	금회 기성금액	잔액
총 공 사 비	734,980,000	568,400,000	166,580,000	-
도 급 비	484,280,000	376,600,000	107,680,000	-
관급 자재비	250,700,000	191,800,000	58,900,000	-

바. 예산과목별 내역 (도급비)                                   (단위 : 원)

구 분	기 성 내 역 (도급비)			비고
	계	전회까지 누계금액	금회 기성금액
계	484,280,000	376,600,000	107,680,000
시설비(노후밸브정비)	325,000,000	258,900,000	66,100,000
기타교체비	34,440,000	34,440,000	-
소방용수시설 설치	52,650,000	52,650,000	-
소방용수시설 보수	72,190,000	30,610,000	41,580,000

사. 예산과목별 지출액 (구분확인제 지출확인)                     (단위: 원)

구 분	정산금액	구분확인제지출액 (기 지출액)	금회(정산)지출액	비고
합 계	107,680,000	9,669,000	98,011,000	노무비지출
시설비(노후밸브정비)	66,100,000	9,669,000	56,431,000	(‘15/2월분)
소방용수 설치 및 보수	41,580,000	-	41,580,000

붙  임 : 1) 기성보고서 1부.

2) 기성내역서(4차) 1부.  끝

주무관	서장원		시설관리과장	이자원		강서수도사업소장	04/02 이상래
협조자	주무관	손종백		주무관	김유진		행정관리팀장	김경식
시행	시설관리과-6406	(		)	접수		(		)
우			/
전화	(02)3146-4011	/전송	(02)3146-4039	/		/	대시민공개