문서번호	설비부-3837
결재일자	2015.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		유병기	04/02 박기형
협조

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04

도시기반시설본부

(설  비  부)

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역』

물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회) 검토보고

우리 본부에서 시행 중인 「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역」과 관련 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회) 요청서가 제출되어 아래와 같이 검토 결과를 보고 드림.

※ 조정기준일 : 2015.01.01.  조정율 : 4.99%  조정 적용금액 : 28,810천원

1		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역

□ 사업기간 : 총차 ′12.01.02.~′16.03.31.(4차 ′14.04.11.~′15.12.20.)

□ 계약금액 : 총차 2,183,947천원(4차 929,099천원)

□ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링, ㈜유신

2		계약금액 조정 관련 근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

□ 서분감 제2015-184(2015.04.01.)전면책임감리용역 물가변동으로 인한 계약금액 조정 재검토 보고

3		계약금액 조정 검토

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 충족 요건

○ 계약 체결일로부터 90일 이상 경과하고 입찰일을 기준으로 산출된 품목조정율이 3% 이상 증감된 경우

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 내용

○ 계약금액 조정 기준 검토

구분	기준시점 (계약체결일)	비교시점 (조정기준일)	조정 충족요건	경과일수 (지수증감)	조 정 율	조정 검토결과	비 고
용역	‘11.11.28	‘15.01.01	90일 이상 (3% 이상)	1,137일 경과 (4.99% 증가)	품목조정율	적 합

○ 세부검토 내용

구 분		검 토 내 용	비 고
①감리용역 계약금액(B)		2,183,947,000원	․ 도급계약서 사본참조
②물가변동 적용제외 계약금액(C)		1,606,422,262원	․ 물가변동 적용대가 산출근거 참조 ㉮투입현황을 감안하여 산출
㉮물가변동 조정기준일 현재감리원 투입현황	계획 투입	131.39인월수	․ 투입계획표 참조
	실 투입	131.39인월수
③물가변동 적용대가(D)		577,524,738원	․ D = B-C
④물가변동 조정율(%) (A)		4.99(%)	․ 품목조정율 산출표 참조
⑤물가변동등락 대상조정금액(G)		28,810,000원	․ G=(A×D),(만단위미만절사)
⑥선급금공제금액(E)		-	․ 해당사항없음
⑦물가변동조정 적용금액(F)		28,810,000원	․ F = G - E

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정내용

(단위 : 원)

구 분	계 약 금 액	ESC 조정금액(1회)	변경 계약금액	비 고
도급비	2,183,947,000	28,810,000	2,212,757,000

4		보고자 의견

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청 사항 관련 규정에 의하여 검토한바, 적합하게 산출되었기에 감리단에 승인 통보하고 계약내역에 반영토록 조치하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 승인요청 공문 1부.

2. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 보고서 1부.

3. 계약서 사본 1부. 끝.