문서번호	전시기획과-495
결재일자	2015.4.3.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		전시기획과장	한성백제박물관장
김은정		김기섭	04/03 이인숙
협 조
	총무과장			김영선
	백제학연구소장			조영하
	교육홍보과장			권순철
	유물과학과장			이경자

2015 국제교류전

<중국고대도성문물전: 한·위진·남북조> 개최 시행계획

2015. 4.

한성백제박물관

전시기획과

2015 국제교류전

<중국고대도성문물전: 한·위진·남북조> 개최 시행계획

중국 고대 제국諸國의 도성에서 출토된 유물을 전시 소개함으로써 서울시민 및 관람객의 중국 고대 및 동아시아 도성문화에 대한 이해를 깊게 하고 백제왕도 한성 및 고대생활사 복원의 참고자료를 확보하며 한중 양국의 우호증진에 이바지하고자 함

1		전시개요

○ 전 시 명 : 2015 국제교류전 <중국고대도성문물전: 한·위진·남북조>

○ 기    간 : 2015. 9. 8(화)～2015. 12. 6(일) / 78일간

○ 장    소 : 기획전시실

○ 입 장 료 : 없음(무료)

○ 사업내용

항 목		내 용
국외유물 대여	전시협약 체결	中國文物交流中心과 협약체결 추진
	국외유물운송	해외유물 운송 전문업체 선정
전시물 제 작 설 치	전시설계	협상에 의한 계약
	전 시 물	벽체구조물, 설명패널, (임시)진열장 및 모형, 영상
	진 열 장	시스템 진열장 제작
간행물 제 작	도록제작	900부, 200쪽 내외(표지 랑데부 240g, 내지 130g)
	리 플 렛	2종(일반, 어린이용)
홍 보	인 쇄 물	포스터, 초청장
	홍 보 물	내․외부 배너, 대형현수막
부 대 행 사	개막행사	작은음악회, 테이프컷팅, 케이터링 등
	교 육	전시 관련 체험․교육
	특별강연	국제학술심포지엄 진행

○ 소요예산 : 485,000천원

2		추진방향

○ 장안성, 낙양성, 업성 등 중국 고대도성 출토 유물 중심 전시

○ 한·위진·남북조의 도성문화를 통해 각국의 문화적 정체성을 각종 유물과 전시매체로 쉽고 재미있게 설명

○ 중국의 고대도성문화를 통해 동아시아 각국(백제)의 도성문화를 심층적으로 이해할 수 있는 유물 및 관련 자료 수집, 연출

○ 中國文物交流中心, 中國社會科學院 등의 기관과 합리적 업무협약을 통해 원활한 협조체계 구축 및 한중 문화교류․우호 증진

○ 비영리적 전시 및 학술회의 운영으로 대시민 문화서비스 강화

3		세부 추진내용

○ 전시구성(안)

주 제	전 시 내 용	연출
프롤로그	○ 전시개요 ○ 중국역사 연표, 중국 역대왕조의 영토 및 도성 지도	영상 그래픽 패널
중국 고대 도성제의 성립: 漢	○ 고대 도시의 발달과 도성의 출현 － 고대 도성제의 성립과정 － 장안성의 축성과정과 구조 － 장안성의 왕궁생활과 의례 ○ 장안성 사람들: 전한前漢 － 장안성 사람들의 의식주 및 사회활동 － 무덤과 부장품 ○ 낙양성 사람들: 후한後漢 － 낙양성 사람들의 의식주 및 사회활동 － 무덤과 부장품	영상 모형 그래픽 패널
고대 도성 문화의 변동: 魏·晉	○ 삼국의 정립과 진晉의 통일 － 위·진대 시대상황 － 귀족문화의 일면: 옥기, 자기, 동경	영상 그래픽 패널
새로운 도성제의 출현: 北朝	○ 새로운 문화 유입과 새 도성 건설 － 북위 낙양성의 구조와 특징 － 낙양성 사람들의 생활과 사상 ○ 업북성 사람들과 그 주변	영상 모형 그래픽 패널
에필로그	○ 중국 고대 도성제의 완성 － 당 장안성 － 동아시아 각국의 도성	그래픽 패널

○ 전시유물 대여

－ 전시요청서 제출(2014년 10월) → 대상유물 선정(12월) → 세부사항 협의(2015년 1～7월) → 유물운송(8월) → 전시(9월～12월) → 유물반환(12월)

○ 전시설계 및 전시물 제작․설치

－ 전시설계에 따라 벽체 구획․설치

－ 연출효과를 위해 임시진열장 제작

－ 영상, 모형 제작

○ 시스템 진열장 제작

－ 온습도 조절 및 조명 보완 시스템 진열장 추가 제작

○ 전시간행물 제작

－ 도    록 : 900부/180쪽 내외/랑데부

－ 포스터, 초청장, 리플렛 2종

○ 홍보물 제작

－ 배    너 : 가로등배너(공원, 관내외 시설물)

－ 현 수 막 : 설치위치에 따라 규격별 제작․설치

○ 부대행사

－ 개막행사 : 작은음악회, 테이프컷팅, 케이터링 등

－ 특별강연 : 4~5회 진행

4		사업자 선정

○ 대상사업 및 일정

－ 시스템 진열장 제작 : 2015년 4～7월

－ 전시물 제작·설치	: 2015년 5～8월

○ 선정방법 : 제안서 평가를 통한 공개경쟁(국가종합전자조달시스템, 서울시 홈페이지 공고)

○ 계약방법 : 협상에 의한 계약

입찰공고 및 제안서 접수	▶	제안서 평가	▶	협상자 선정	▶	협상 및 계약	▶	사업 수행	▶	사업 완료
∙기간: 10일 혹은 20일		∙평가위원회 구성 (7인이상)		∙협상대상자 선정 (3배수)		∙전시과 : 협상 ∙재무과 : 계약		∙진열장 제작 ∙전시물 제작: 패널, 모형, 영상		∙전시 운영: 9~12월

※관련근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제43조, 제44조(지식기반사업)

○ 심사내용

기 술 능 력 평 가(90)		입찰가격 평가(10)
정량적 평가(20)	정성적 평가(70)	행안부 예규 제438호 (입찰가격 평점산식 참조)
실적평가, 능력평가 등	제안서 평가

※정량적 평가(20점)를 넘지 않는 범위 내 가산점 부여(약자 및 우수기업, 중소기업, 일자리창출,      고용안정, 근로관계법 준수정도 등)

○ 심사위원회 구성(7인 이상)

－ 평가항목 : 기획․설계, 제작, 사업 실행력, 디자인 등

－ 구    성 : 국공립박물관 관계자(2), 역사․고고학 전문가(3), 전시연출 전문가(2)

5		행정사항

○ 소요예산 : 485,000천원

－ 한성백제박물관/선사․고대역사문화공간창조/박물관운영활성화/

백제문화특별전/사무관리비․공공운영비․행사운영비(100-201-01․02․03)

－ 한성백제박물관/선사․고대역사문화공간창조/박물관운영활성화/

백제문화특별전/외빈초청여비(100-301-07)

－ 한성백제박물관/선사․고대역사문화공간창조/박물관운영활성화/

백제문화특별전/시설비․행사관련시설비(100-401-01․04)

－ 한성백제박물관/선사․고대역사문화공간창조/박물관운영활성화/

백제문화특별전/자산및물품취득비(100-405-01)

※ 유물 대여료, 운송료 등 국외관련사항은 환율변동 등에 따라 금액변동 개연성 있음

○ 계약 및 집행방식

－ 국외 유물 대여료

▸ 집행방식 : 협약에 의해 지정계좌로 송금

▸ 소요예산 : 100,000천원

－ 전시물 제작 설치

▸ 계약방식 : 협상에 의한 계약

▸ 사업내용 : 전시 설계, 벽체구조물, 설명패널, 진열장 및 모형, 영상, 내․외부 배너, 대형현수막, 작은음악회, 케이터링, 작은 음악회, 전시관련 교육활동 등

▸ 소요예산 : 155,000천원

－ 시스템 진열장 제작

▸ 계약방식 : 협상에 의한 계약

▸ 사업내용 : 시스템 진열장 제작

▸ 소요예산 : 90,000천원

－ 전시도록 제작

▸ 계약방식 : 소액수의계약

▸ 사업내용 : 전시도록 편집, 인쇄, 교정, 납품, 부대비용

▸ 소요예산 : 20,000천원

－ 홍보물 제작

▸ 계약방식 : 소액수의계약

▸ 사업내용 : 리플렛 2종(일반, 어린이용), 포스터, 초청장

▸ 소요예산 : 10,000천원

－ 국외 유물 운송 및 박물관 및 문화재단종합보험 가입

▸ 집행방식 : 수의계약 및 일상경비 교부 집행

※ 국제미술품운송사협회 가입 업체

※ 관련근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조 8항

▸ 사업내용 : 국외 유물 포장 및 운송 전문업체 용역, 무진동 차량 대여 및 항공운송, 운송․보관․전시 시 유물 손괴 보험 가입

▸ 소요예산 : 60,000천원

－ 외빈 초청

▸ 계약방식 : 일상경비 교부 집행

▸ 사업내용 : 중국 문물교류중심 및 사회과학원 관계자 초청(3회)

▸ 소요예산 : 40,000천원

－ 전시자문위원회, 우편물발송 등 전시운영 관련

▸ 계약방식 : 일상경비 교부 후 집행

▸ 사업내용 : 자문위원 및 제안서 평가위원 수당, 우편료, 사진촬영 등

▸ 소요예산 : 10,000천원

내 용
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
□ 전시요청서 전달 및 전시협의서 합의
□ 전시유물 대여 및 세부사항 협의
□ 시스템 진열장 제작 발주 및 시행
□ 전시물 제작설치 발주 및 계약
□ 국외 유물 운송 계약 및 시행
□ 도록 및 설명패널 원고작성
□ 설계 및 모형․영상 제작
□ 전시물 제작 및 설치
□ 도록 편집 및 인쇄
□ 전시운영 및 도록 배포
□ 전시운영 마무리 (전시물 철거, 대여유물 반납, 결과보고)

○ 추진일정

6		기대효과

○ 중국 고대도성 주요 유물을 한국에서 관람할 수 있게 됨에 따라 시민고객들에게 폭넓은 서비스를 제공.

○ 전시 개최로 한중 문화교류 및 우호증진에 이바지하며, 향후 서울의 백제왕도유적 세계문화유산 등재 등에 도움이 될 것으로 기대.

붙임: 전시 협의서(국문, 중문) 각 1부.  끝.