문서번호	은평병원원무과-50
결재일자	2014.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
유영환	전재용	오세양		01/02 남민
협 조

기계실 및 전기실  등 에폭시 도장공사

2014. 01.

서울특별시 은평병원

(원무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

기계실 및 전기실  등 에폭시 도장공사

지하 기계실 및 전기실의 바닥도색이 노후화로 시설물유지관리 및 의료기관 인증평가 대비하기 위한 기계실 및 전기실 등 에폭시 도장공사를 시행하고자 함

추진경위

지하 기계실 및 전기실 등의 바닥도색이 노후화로 시설물유지관리 및 의료기관 인증평가(2014.01.14.~01.16) 대비하고자 함

공사개요

공 사 명 : 기계실 및 전기실 등 에폭시 도장공사

공사대상 : 기계실 및 전기실 바닥 등

공사기간 : 착공일로부터 10일

공사내용

- 기계실 및 전기실 등 에폭시 도장공사

세부추진계획

추진기간 : 2014.01.3.~01.12(10일)

공정계획(10일)

- 1 ~ 2일 : 바닥철거

- 3 ~ 4일 : 빠대작업

- 5일 : 하도작업

- 6일 : 중도작업

- 7일 : 상도작업

- 8일 : 청소 및 정리작업

- 9 ~ 10일 : 준공예정

소요예산 : 9,000천원

예산과목 : 연구활성화 및 시설환경개선으로 진료서비스 증진, 은평병원운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 공공운영비(100-201-02)

계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를당사자로하는계약에관한 법률 시행령 제25조제1항제5호

행정사항

공사차량 출입협조 : 원무과.

공사에 따른 소음, 먼지 등 최소화 등 공사감독 철저