투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	설비부장
(경유)
제 목	설계변경 본부위원회 자문 요청(서남 고도처리 및 시설현대화사업)

1. 우리부에서 시행중인 「서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업」 총인처리시설에 대한 설계변경 본부위원회(토목) 자문을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 자문위원회(본부위원회) 자문내용

(단위 : 백만원)

공 사 명	자 문 내 용	공 사 비			비고
		당 초	변 경	증.감
서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	1) 응집교반시설 - 급속혼화조 8지 - 완속혼화조 8지 2) 총인처리시설 36만톤/일 - YDF 22대 3) PHC파일 : 5,717본 4) 가 시 설 : 2,030본 5) 역세척수 이송관로 : 943m	35,069	49,747	증)14,678	토목 분야 소위원회 자문 완료

붙임 : 설계변경 본부위원회 자문요청서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	조양호		환경시설과장	윤방식		방재시설부장	04/03 임춘근
협조자
시행	방재시설부-4421	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 14층(방재시설부)	/
전화	02-3708-8784	/전송	02-3708-8756	/	cyh2466@seoul.go.kr	/	대시민공개