투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사일시 중지 알림

1. 우리본부에서 시행중인 “성암로병목구간개선공사”의 시공사인 태권종합건설(주)로부터 자금 및 경영악화를 이유로 사업을 수행할 수 없다는 공사포기각서가 제출되어 후속 업체 선정 시까지(5월경 재개 예정) 부득이 공사를 일시 중지할 수 밖에 없으며, 이로 인해 공사기간을 연기(당초 5월 → 12월 예정)할 예정임을 알려드리니 마포구에서는 지역 주민들로부터 민원 접수시 안내하여 주시기 바라며,

2. 현재 마포구(공원녹지과)에서 추진중인“경의선 공원조성 3단계(성산자동차학원부지) 사업”기본설계 및 실시설계 시 본 사업에서 제외된 보도설치 등으로 지역주민의  민원이 해소될 수 있도록 반드시 우리시(도로계획과 및 도시기반시설본부)와 사전 협의하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장),설비부장,마포구청장(공원녹지과장),마포구청장(토목과장),성산2동장
주무관	김동현		교량건설과장	이동훈		토목부장	04/03 노우성
협조자
시행	토목부-6787	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개