문서번호	도로관리과-374
결재일자	2014.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도로안전시설팀장	도로관리과장		시설안전정책관
고광호	최연우	최동필		01/08 정시윤
협 조

2014년 도로사면 운용계획 보고

도시안전실

(도로관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	급경사지재해예방에관한법률 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2014년도 도로사면 운용계획 보고

도로사면 취약개소에 대한 안전점검 실시, 위험요인 제거, 보수 ․보강 추진 등 재난을 예방하기 위한 2014년도 도로사면 운용계획 수립 보고

Ⅰ		안전점검 계획

□ 도로사면(비탈면) 현황                        (’14.1.1 기준)

구 분	관리개소	관리기관	비고
계	299개소
시도	195개소	자치구(151),도로사업소(44)
구도	104개소	해당 자치구

□ 안전점검 실시

❍ 점검대상 : 시도 및 구도상 도로사면

❍ 기간별 중점점검

구 분	기 간	점검부서
해빙기 대비	’14. 2. 15 ~ 3. 15	유지관리부서 (자치구, 도로사업소 등)
수방 대비	’14. 5. 1 ~ 5. 31
수방기간 특별점검	’14. 7. 15 ~ 7. 31
겨울철 대비	’14.11. 1 ~ 11. 30

※ 수방기간(’14.5.15~10.15)중에는 수시점검 및 기상예보에 따라 순찰         강화 실시

- 평상시 각 자치구 및 도로사업소 관내 순찰시 사면점검 병행

□비탈면 보호옹벽(석축), 낙석방지망, 낙석방지울타리, 배수구 등

파손 및 균열, 퇴적 상태 등 점검

❍ 점검방법

- 점검반 편성 : 시설물관리 부서별 자체 점검반 편성 후 점검실시

※ 취약지역(시설)에 대해서는 사면 전문가와 합동점검 실시

- 중점 점검사항 : 점검표에 의한 현장 점검

□ 급경사지의 절․성토부 인장균열․침하 및 배부름 발생 여부

□ 지하수 용출수 및 낙석 발생 여부

□ 옹벽, 석축의 파손 및 손괴, 균열 발생 여부

□ 낙석방지책 및 낙석방지망 훼손 여부

□ 배수시설(산마루 측구, 배수로, 침사지 등)파손 및 준설(퇴적) 여부

□ 기타 안전사고 위험요인 등

□ 점검결과 조치사항

❍ 단순, 경미한 사항은 신속한 응급보수 등 위험요인 제거

- 낙석제거, 배수로 정비, 마대 쌓기 등 단순 보수사항

❍ 사면(비탈면) 안정화를 위한 보수․보강이 필요한 경우

- 구도상 도로사면 : 자체 정비계획 수립하여 우기전(6월) 정비완료

- 시도상 도로사면 : 응급보수 및 정비계획 수립, 필요시 시비 배정요청

하여 우기전(6월) 정비 완료

Ⅱ		보수․보강 추진계획

□ ’14년도 예산현황

❍ 대    상 : 특별시도상 취약지역 도로사면

❍ 사업기간 : ’14. 1. ~ ’14. 11.

❍ 사 업 비 : 2,900백만원

❍ 사업규모 : 사면보호공 및 낙석방지망 등 보수, 측구․배수로․침사지

정비, 안전진단용역 등

□ 세부 사업내역

□ 성북구 정릉로 도로사면 보수․보강공사

❍ 사업기간 : ’14. 2.~ 5. 31

❍ 사 업 비 : 200백만 원

❍ 사업규모 : 보강토 옹벽 500㎡, 토공작업 550㎡, 기타 부대공 1식

❍ 위치도 : 정릉로(정릉로8길 55~10길81번지)

▸ 위치도(정릉로8길 55~10길81번지)	▸ 사진설명 : 사면 노출 등

□ 종로구 삼청로길 도로사면 보수․보강공사

❍ 공사기간 : ’14. 2.~ 5.31

❍ 공 사 비 : 520백만 원

❍ 공사규모 : 빗물받이 34개소, 낙석방지방 900㎡, 낙석방지책

60경간, 배수시설 1500m, 도로옹벽 4개소 등

❍ 위치도 : 삼청로(종로구 삼청공원 ~ 삼성터널 입구)

▸ 위치도(종로구 삼청공원 주변)	▸ 사진설명 : 도로변 측구 파손 등

□ 구로구 오류동 도로옹벽 보수․보강공사

❍ 공사기간 : ’14. 2.~ 5.31

❍ 공 사 비 : 130백만 원

❍ 공사규모 : 옹벽 면보수 500㎡, 안전시설 1식 등

❍ 위치도 : 오리로(구로구 오류동 124-22번지)

▸ 위치도	▸ 사진설명 : 표면 노후, 부식 등
동부제강앞옹벽

□ 기간별(해빙기, 수방대비 등) 안전점검 결과 취약지역 보수․보강사업

❍ 공사기간 : ’14. 1. ~ 6.30

❍ 사 업 비 : 1,520백만 원

❍ 사업규모 : 실시설계용역. 사면보호공 및 낙석방지망 설치, 배수로

(산마루 측구,집수정 등) 설치

□ 수해복구 사업 추진

❍ 공사기간 : ’14. 6.15 ~ 11.30

❍ 사 업 비 : 524백만 원

❍ 사업규모 : 실시설계용역, 사면보호공 및 낙석방지망 설치, 배수로 및

산마루 측구 설치 1식

Ⅲ		향후계획

□ 도로사면 관리자(담당자) 전문교육 실시

❍ 교육시기 : ’14. 2~3월경

❍ 교육대상 : 市, 자치구, 도로사업소 도로사면 관리자(팀장,담당자)

❍ 강   사 : 외부 사면전문가

❍ 교육내용

- 사면 유지관리 방안(보수공법 사례 등)

- 사면 안전점검시 주요 점검사항 등

□ 해빙기 대비 도로사면 안전점검 실시

❍ 기 간 : ’14. 2. 15 ~ 3. 15(1개월)

❍ 대 상

- 시도 및 구도상 관리하고 있는 도로사면(비탈면) 299개소

- 그 밖에 재해예방을 위하여 안전점검이 필요한 인공․자연비탈면

❍ 점검방법 : 자치구, 도로사업소 등 점검반 편성 후 점검실시

(사면전문가와 합동점검)

붙임 : 1. 도로사면 관리 현황 1부.

2. 도로사면 점검표 1부. 끝.