문서번호	도로관리과-397
결재일자	2014.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	도로관리과장	시설안전정책관
이상하	김순수	최동필	01/08 정시윤

-‘14년도 도로부속시설물 일상유지관리 -

사업소별 사업비 재배정계획

2014. 1.  .

도 시 안 전 실

[도로관리과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	국토해양부 도로안전시설설치 및 유지관리지침	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	6개 도로사업소	)		무 □

-'14년도 도로부속시설물 일상 유지관리 계획수립 -

사업소별 사업비 재배정계획

시도상 설치된 도로부속시설물 파손, 노후, 기능저하, 먼지오염 적치 등을 정비하여 각종 안전사고 예방 및 시민불편 사항을 해소하는 사업으로서 이에  따른 소요예산을 배정코자 함.

Ⅰ. 도로부속시설물 관리현황                      (‘12.12월말 현재)

구 분	도로옹벽 (m)	과속방지턱 (개)	충격흡수시설 (개)	미끄럼방지 시설(㎡)	방호울타리 (m)	비고
일반 시도	8,229 (44)	327	914	318,737 (368)	435,147 (747)	※( ) 개소수

Ⅱ. ‘14 사업추진 계획

○ 위   치  : 사업소별 관내 일원

○ 사업기간 : ‘14. 1. ~ ’15. 2

○ 사 업 비 : 2,000백만원(시설비 : 1,990백만원, 시책업무추진비 : 10백만원)

○ 보수공종

- 미끄럼방지시설   :  7,470㎡    - 중앙분리대보수     :  1,780m

- 충격흡수시설보수  :    60개     - 옹벽 벽체보수       :  1,114㎡

- 옹벽 균열보수     :   975m     - 도로부속시설물 세척 : 75,530㎡

- 과속방지턱 보수   :    50m     - 돌포장보수   : 307㎡ 등 기타사항정비

Ⅲ. 사업소별 예산배정 계획                           (단위:백만원)

사업소명	‘14 예산현액	배정액	배정잔액	비 고
계	1,990	1,890	100	시설비
동 부		240	0	※ ‘12년도(120백만원),’13년도(213백만원) 집행실적을 참고하여 사업비 조정
서 부		330	0
남 부		330	0
북 부		330	0
성 동		330	0
강 서		330	0

【예산 과목】 부서 : 도시안전실 도로관리과, 정책 : 도로시설물관리, 성과 : 도로시설물                         안전관리 및 수준향상, 단위 : 도로 및 도로부속물 관리, 세부 : 도로                             부속시설물 일상유지관리

Ⅳ. 추진일정

○‘14. 1.  : 사업소별 예산배정

○‘14. 2.  : 현장조사,설계 및 공사발주(연간단가 사업)

○‘14. 3.  : 공사착공 및 시행

○‘15. 2.  : 공사완료

Ⅵ. 향후계획

◦‘13년도 도로부속시설물 유지보수 준공기한이 ’14. 2월이므로 도로               안전사고예방 및 시민불편사항 등을 공백없이  ‘14.3 조기 착공할 수          있도록 신속히 사업비 재배정.

따로붙임 : ‘14년 도로부속시설물 공종별 산출액  1부.  끝.

참고자료