문서번호	총무과-387
결재일자	2014.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
담당자	주무관	총무과장	관리부장		서울대공원장
강재현	김승규	이경로	정상택		01/09 안영노
협 조

『백두산호랑이숲 조성 방송통신 공사』

준공기한 연기(제2회) 보고

2014. 1

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『백두산호랑이숲 조성 방송통신 공사』 준공기한 연기(제2회) 보고

『백두산호랑이숲 조성 방송통신 공사』 추진관련 현안사항 반영을 위한 전체공정 연기에 맞춰 방송통신공사의 공정연기를 위한 보고임

Ⅰ

사 업 개 요

□ 공 사 명 : 백두산호랑이숲 조성 방송통신 공사

□ 공사기간 : 2013. 3. 13. ~ 2014. 1. 15.

□ 계약금액 : 59,248,330원

□ 도급업체 : ㈜파스컴 이영수

□ 사업내용 : (1) 방송설비 공사

관람객 안내방송용 앰프, 스피커설치

(2) CCTV설비 공사

호랑이방사장 CCTV설치

Ⅱ

현 안 사 항

□ 「백두산호랑이숲 조성공사」 제2회 설계변경 및 공기연장(2014.2.28.)에맞춰

『백두산호랑이숲 조성 방송통신 공사』의 추가 공기연장 필요

Ⅲ

조 치 계 획

□ 위 현안사항과 같이 공사기간 연장이 불가피하므로 아래와 같이 연장하여

사업추진에 만전을 기하고자 함

구 분	변 경 사 항		비 고
	변 경 전	변 경 후
조성공사	2012.12.27 ~ 2013.12.31	2012.12.27 ~ 2014.2.28	2차 준공기한 연기
방송통신공사	2013.3.13 ~ 2014.1.15	2013.3.13 ~ 2014.2.28

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 백두산호랑이숲 조성공사 설계변경(제2회) 및 준공기한 연기 시행.  끝.