문서번호	조경과-353
결재일자	2014.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장		푸른도시국장
배규중	김수영	이원영		01/09 오해영
협 조

2014년 지정보호수 유지관리사업 추진계획

2014. 1.

푸른도시국

(조경과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 지정보호수 유지관리사업 추진계획

지역의 역사성과 상징성을 간직하고 있는 보호수에 대해 외과수술, 병해충방제 등 유지관리를 통해 지속적인 생장을 도모하고, 보호수 주변 정비를 통해 지역주민의 휴식과 만남의 장소로 제공하고자 함

추진방향

수목보호기술자의 정확한 진단에 의한 보호수 유지관리 사업 시행

직접적인 유지관리외에도 주변 여건을 고려한 생육환경 개선

보호수 주변 정비를 통해 지역주민의 휴식과 만남의 장소 제공

사업개요

현    황 : 종로구 궁정동 55-3번지 회화나무 등 216주

사업기간 : 1999년 ~ 계속

사업내용

‣ 병해충방제, 외과수술, 수형조절 등 보호수 생육환경 개선

‣ 보호수 주변정비를 통해 만남과 휴식의 장소 제공

총사업비 : 14,160백만원(‘13년 이전 5,805, ‘14년 409, ’15년 이후 7,946)

그 간의 추진실적

기    간 : 1999년 ~ 2013년

규    모 : 유지관리 1,555주(‘13년 150주, 쉼터조성 80㎡, 정비 541㎡)

총사업비 : 5,805백만원(‘13년 493백만원)

2014년 사업계획

사업기간 : 2014. 1 ~ 10월

사업대상 : 21개 자치구 147개소 186주, 400㎡

‣ 지정보호수 유지관리 : 146개소 185주

‣ 지정보호수 주변정비(주민참여) : 1개소 1주 400㎡

사업내용

‣ 병해충방제, 수형조절, 외과수술, 영양공급 등 보호수 생육환경 개선

‣ 보호수 주변을 정비하여 만남과 휴식 장소로 제공

‣ 사연있는 나무이야기 책자 제작(희망일기) : ‘14. 2월 완료 예정

사 업 비 : 409백만원

(단위 : 천원)

계	지정보호수 유지관리 (마을정자목 쉼터조성) [시 설 비]	지정보호수 주변정비 (주민참여) [자치단체자본보조]	비 고
409,000	359,000	50,000

예산과목

‣ 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충,

- 지정보호수 유지관리(마을정자목 쉼터조성), 시설비(401-01)

- 지정보호수 주변정비(주민참여), 자치단체자본보조(403-01)

추진일정(기한)

지정보호수 유지관리	지정보호수 주변정비(주민참여)
‣ ‘14. 1. 10 : 관리비 재배정 ‣ ‘14. 1 ~ 2 : 설계시행 ‣ ‘14. 2 ~ 9 : 공사시행 ‣ ‘14. 10. 10 : 준공보고 ※ 병해충방제, 외과수술, 영양공급, 수형 조절 등 공종별 유지관리 적기에 시행	‣ ‘14. 1. 10 : 설계착수 ‣ ‘14. 2. 15 : 설계심의 ‣ ‘14. 2. 25 : 설계심의 조치결과 보고 및 보조금 지급 요청 ‣ ‘14. 3. 07 : 공사발주 ‣ ‘14. 4. 01 : 공사착공 ‣ ‘14. 5. 10 : 공사준공 ‣ ‘14. 5. 20 : 준공보고

추진방법

지정보호수 유지관리

‣ 유지관리비를 일괄 재배정하고, 유지관리 공종별(병해충방제, 외과수술, 영양공급, 수형조절 등) 추진 적기에 시행

‣ 공종이 단순하고 소액(주당 3백만원 내외)이므로 자체설계 시행하고 설계심의는 생략

‣ 수목보호기술자의 정밀진단 후 보호수 유지관리 사업 추진

‣ 수목식재, 조경시설물 설치는 가능한 배제하고 보호수의 생육환경 개선 및 안내판 정비 위주로 사업 시행

‣ 보호수 주변은 잔자갈, 초화류 등으로 피복하고, 휀스는 목재로 설치

‣ 소나무는 수형유지를 위한 적정한 속가지 제거작업을 통해 C/N율을 유지하여 고사 가지 발생 방지

지정보호수 주변정비

‣ 설계심의 후 자치구 보조금 지급 요청에 따라 보조금 지급

‣ 실시설계 등 관련 절차를 조속히 이행하여 상반기 중 공사완료

‣ 보조금 정산보고 및 집행잔액 반납 철저

행정사항

사업 착공/준공보고 5일 이내 제출(보호수별 공사내용 첨부)

보호수 주변 각종 행위에 대한 사전 협의 철저

「서울특별시 보호수지정 및 관리에 관한 조례」에 의거 보호수 보호 및 점검, 관리대장 기록관리 철저

“자생식물 및 산림유전자원보호구역 관리요령”이 폐지(‘13.10.30)되어 향후 법령 개정시까지는 “보호수 지정 및 관리지침” 적용

붙임 : 1. 2014년 사업대상지 및 가내시 내역 1부.

2. 착공/준공보고 서식 1부.

3. 보호수 지정 및 관리지침 1부.  끝.