문서번호	서북병원원무과-441
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설팀장	원무과장	서북병원장
하상덕	조선행	조기현	01/10 김한선
협 조
	진료부장		서해숙
	서무팀장		이정선
	주무관		이원영
	주무관		김병용
	주무관		이지영

결핵 액체배양기 도입에 따른

진단검사의학과(무균실) 공간 재배치 추진

서북병원 원무과

결핵 액체배양기 도입에 따른

진단검사의학과(무균실) 공간 재배치 추진

결핵환자 조기발견을 위하여 우리병원에 결핵 액체배양기가 도입도힘에 따라 진단검사의학과 무균실 확장 및 공간 재배치를 실시하여 결핵전문병원으로서 원활한 결핵균 액체배양 검사 추진에 만전을 기하고자 함.

관련근거

○ 진단검사의학과 장비구매계획 (진단검사의학과-3168, 2013.04.19.)

○ 결핵액체배양기 도입에 따른 무균실 확장공사 요청(2013.06.27.)

추진계획

○ 사 업 명 : 서북병원 진단검사의학과 환경개선공사

○ 위    치 : 본관2층 진단검사의학과

○ 사업내용

- 결핵 액체배양기 등 검사장비 설치 공간 확보(액체배양기등 4종)        ▸진단검사의학과 본관 일부를 무균실로 편입 공사

▸결핵균 검사 검체 전처리실 및 배양검사실 확보

- 항온․항습 유지를 위한 무균실 냉난방 설치 등

○ 사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 3

○ 사 업 비 : 45,000천원

○ 예산과목 : 서북병원 운영, 서북병원 청사시설 운영관리, 시설비

추진일정

○ 기술용역(설계) 타당성 심의 및 설계발주  -------- 2014. 1월 중

○ 설계완료 및 공사발주  -------------------------- 2014. 2월 중

○ 공사관련 감염관리위험도 심의(감염관리위원회)---- 2014. 2월 말

○ 진단검사의학과 환경개선공사 완료 --------------- 2014. 3월 중

붙임   결핵 액체배양기 도입에 따른 무균실 확장공사 요청서 1부. 끝.