문서번호	도로시설과-4222
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전용도로팀장	도로시설과장
성기선		이앙식	04/06 이덕기
협조

2015년 북부간선고가

교면포장 개량공사 구간 검토 보고

2015. 4.

도 로 시 설 과

2015년 북부간선고가

교면포장 개량공사 구간 검토 보고

시설관리공단으로부터 북부간선고가교의 안전하고 효율적인 도로관리를  위하여 2015년 교면포장 개량공사 정비대상 구간을 선정하고 협의하였기 검토 보고함.

Ⅰ		현 황

□ 근거 :「 12년 자동차 전용도로 시설물 포장개량 기본조사 및 실시설계 」(도로시설과)

□ 교면포장 정비계획 및 실적

○ 정비계획 및 실적(‘12~16년)                                   (단위 : a, 백만원)

정비계획						실 적
구 분		STBR	본선	도시개발 공사구간	예산	STBR	본선	도시개발 공사구간	예산
계		109	137	79	7,444	29	58	79	3,244
		-	360	-
‘12년	전면	-	-	12	200	-	-	12(공단)	200
	부분	-	-	-		-	-	-
‘13년	전면	-	24	31	1,780	-	58(공단)	31(사업소)	700(공) 1,180(사)
	부분	-	-	-
‘14년	전면	29	-	36	1,164	29	-	36	1,164
	부분	-	-	-		-	-	-
‘15년	전면	80	113	-	3,000
	부분	-	123	-
‘16년	전면	-	-	-	1,300
	부분	-	237	-

○ 정비계획 도면

Ⅱ		‘15년 교면포장 개량공사 대상 검토

□ 시설물 현황

시설명	준공년도	종별	폭(m)	연장(m)	형식	설계하중
북부간선고가	본선, STBR:2002년 도개공구간:1997년	1종	9.3~19.0	STBR : 981 본선 : 4,224 도개공: 478	Steel Box Girder	DB-24

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 북부간선고가교 교면포장 개량공사(장기계속공사)

○ 위    치 : 북부간선도로(양방향) 하월곡램프 ~ 묵동IC

○ 공사개요 : 노면절삭 및 아스팔트 덧씌우기(8㎝) 332.94a(금차 193.76a)

노면절삭 및 아스팔트 덧씌우기(4㎝) 360.16a(금차 123.13a)

교면방수 325a(금차 196a), 배수시설, 부대공 등

○ 공사기간 : 2013.07. ~ 2016.12.31

○ 도 급 사 : (주)유진컨스트랙, 홍용종합건설(주)

○ 총사업비 : 전체분 6,422백만원(관급자재 포함)

(‘13년 1,180백만원, ‘14년 1,164백만원, ‘15년 3,000백만원, ‘16년 1,058백만원)

□  2015년 예산편성 시 사업계획 내용

○ 2012년 시행한 「‘12년 자동차 전용도로 시설물 포장개량 기본조사 및 실시설계 」의  연차별 포장계획(공사 우선순위)에 의거 2015년 정비대상 구간 선정

- 위 치(전면) : (월곡방향) P42L ~ MP1, L=1,261m (B=8.3m) 193a

(구리방향) MP1 ~ MP19, L=1,800m (B=8.3m) 123a

□ 2015년 포장개량 대상구간 검토(도로관리처, 도로시설처)

․ 북부간선고가 정밀안전진단용역보고서 (북부도로사업소, 2014.06)

․ 포트홀 다발 발생구간 검토

○ 2014년 정밀안전진단(구리방향) : 바닥판 및 포장 상태평가 결과

번호	구조형식	바닥판	포장	결함도점수	우선순위	비고
P42R~P1	강박스	b	a	진단 후 시공	2014년	STBR-10
P1~MP1	강박스	b	d	0.085	1순위	STBR-11
MP1~MP6	강박스	c	a	0.044	2013년	본선
MP6~MP15	강박스	c	a	0.044	2013년	본선
MP15~MP42	강박스	b	c	0.065	2순위	본선
MP42~MP69	강박스	b	c	0.065	2순위	본선
MP69~MP86	강박스	b	c	0.065	2순위	본선
MP86~P7	강박스	b	a	진단 후 시공	2014년	도개공구간
P7~A2	강박스	b	a	0.036	2012년	도개공구간

○ 2014년 정밀안전진단(월곡방향) : 바닥판 및 포장 상태평가 결과

번호	구조형식	바닥판	포장	결함도점수	우선순위	비고
P42L~P1	강박스	b	d	0.072	1순위	STBR-9
P1~MP1	강박스	b	d	0.089	1순위	STBR-11
MP1~MP6	강박스	c	d	0.084	1순위	본선
MP6~MP19	강박스	c	d	0.084	1순위	본선
MP19~MP42	강박스	c	d	0.084	1순위	본선
MP42~MP69	강박스	c	d	0.084	1순위	본선
MP69~MP86	강박스	c	d	0.084	1순위	본선
MP86~P7	강박스	b	a	0.036	2013년	도개공구간
P7~P5	강박스	b	a	진단 후 시공	2014년	도개공구간
P5~P1	강박스	b	a	0.036	2013년	도개공구간

○ 2014년 포트홀 발생현황

방향	시점	종점	연장(m)	발생갯수	비 고
계				224
월곡	하월곡분기	하월곡램프	1,400	69	전면개ㅅ3량 구간
	하월곡램프	월릉램프	2,150	37	부분개량 구간
	월릉램프	묵동IC	2,100	14
	묵동IC	신내1교	1,000	2
	신내1교	신내2교	1,250	2
구리	하월곡분기	하월곡램프	1,400	10
	하월곡램프	월릉램프	2,150	27
	월릉램프	묵동IC	2,100	52
	묵동IC	신내1교	1,000	9
	신내1교	신내2교	1,250	2

□ 검토결과

❍ 2014년 북부간선고가교 외 1개소 정밀안전진단보고서 결과 바닥판 및 포장우선보수 순위를 종합적으로 고려하여 우선정비 구간 선정

- 교면포장 조정 내역

구 분	계 획			조 정			비고
	구 간	물량(a)	금액(억)	구 간	물량(a)	금액(억)
전 면	(월곡)P42L~MP1	105	10.5	(월곡)P42L~P1	80	10
	(양방)MP1~MP19	195	19.5	(월곡)MP1~MP15	45	6
	-	-	-	(양방)P1~MP1	40	5
	-	-	-	(양방)MP15~MP19	28	3
부 분	-	-	-	(월곡)MP42~MP69	123	6
계	-	300	30		317	30

- 2015년 교면포장 구간

(월곡) MP6~MP4	(월곡) 월릉 IC

Ⅲ		향후 계획

□  ‘15.  4. : 계약심사

□   ‘15.  4. : 공사계약 및 착공

□   ‘15. 11. : 공사 완료

붙임 :  ‘15년도 북부간선고가 정비대상 1부. 끝