문서번호	교통운영과-6534
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		신호시설팀장	교통운영과장
김영수		김균호	04/06 강진동
협 조	신호운영팀장			고광섭
	교통안전팀장			김세교
	주무관			이용현
	주무관			이상돈
	주무관			최용덕

2015년 소방관서 긴급출동 신호시스템 구축 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04

도시교통본부

( 교통운영과 )

2015년 소방관서 긴급출동

신호시스템 구축 계획

소방차량의 신속하고 안전한 재난현장 접근성 향상을 위하여, 2015년 소방관서 긴급출동 신호시스템 구축 시행에 따른 사업추진에 철저를 기하고자 함

□ 추진근거

○ 소방재난본부 재난대응과-30054호 (2014.12.24.)

서울특별시장 방침 제371호 “재난현장 황금시간 목표제 실행계획”

- 소방관서 긴급출동 신호제어시스템을 3년간 총 68개소 구축

(2014년 32개소, 2015년 10개소, 2016년 26개소 구축)

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2015년 소방관서 긴급출동 신호시스템 구축

○ 사업기간 : 2015. 04. ~ 2015. 10.

○ 사 업 비 : 600백만원

○ 사업목적

- 소방관서 긴급출동 신호시스템 설치 및 중앙분리대, 정차금지대 설치를 통한 소방차량의 신속하고 안전한 출동체계 구축

○ 사업범위

- 서울시내 116개 소방관서 중에서 (기 구축된 32개소 제외) 도로변에 위치하여 최초 출동시점부터 주변 교통량에 따라 출동시간이 좌우되는 소방관서에 긴급출동 신호시스템 10개소 구축

○ 예산과목

- 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리,

교통사망사고 줄이기사업, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

응급차량 접근로 개설(10개소)

□ 2014년 추진실적

○ 사업기간 : 2014. 05. ~ 2014. 12.

○ 총사업비 : 486백만원 - 안전행정부 특별교부세 교부결정(2014.06.16)

○ 사업규모 : 개선대상 68개소 소방관서중 32개소 구축 완료

□ 2015년 추진일정 계획

○ 2015. 04 : 소방재난본부에 구축예정 소방관서 선정 요청

○ 2015. 05 : 실시설계용역 계약업체에 설계 지시

- 강북권역 : (주)동림티엔에스,  강남권역 : (주)트래픽스

- 설계 후 공사금액에 따른 설계비 및 감리비 산출

○ 2015. 06 : 설계자료 서울지방결찰청 규제심의 상정

○ 2015. 07 : 각 도로사업소별 공사비 예산 배정

○ 2015. 08 ~ 10 : 각 도로사업소별 공사 실시 및 준공

□ 행정사항

○ 신호운영실 : 소방관서 긴급출동 신호시스템 구축과 동시에 DB를 부여받아, 신호제어기 긴급작동스위치 구동여부 확인 요함.

○ 각 소방관서 : 추진일정에 맞춰 공사가 원활히 완료되도록 적극 협조하여 주시기 바람.

○ 각 도로사업소 : “교통사망사고 줄이기 사업” 예산으로 추진하는 사업임을 감안하여 예산집행에 철저를 기하시기 바람.

끝.