문서번호	소방행정과-4206
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
조성종	김제현	김규태		04/06 임선호
협 조

2015년도 용산소방서
119안전센터 화장실 및 식당 등 환경개선공사 계획

2015. 4.

용산소방서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 2015년도 용산소방서 -

119안전센터 화장실 및 식당 등 환경개선공사 계획

2015년도 소방청사 보수,보강공사 사업예산의 조기집행을 통한 경제활성화를 촉진하고 노후된 청사를 보수,보강하여 안전하고 쾌적한 근무환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

◈ 市소방행정과-1460(2015.1.20.)호『2015년도 세출예산 재배정 계획알림』

◈ 소방행정과-2122(2015.2.16.)호『용산소방서 2015년도 청사 보수,보강 사업 기본계획』

Ⅱ		추 진 방 향

◈ 노후 청사시설물 보수를 통한 안전하고 쾌적한 청사환경 조성

◈ 직원식당 노후 집기 교체를 통한 복지증진 및 위생관리에 기여

Ⅲ		사 업 개 요

◈ 사 업 명 : 119안전센터 화장실 및 식당 등 환경개선공사

◈ 사업기간 : 2015년 4월. ~ 6월.

◈ 주요사업내용

소 재 지	주요 사업내용
용산소방서(본서) 서울시 용산구 한강대로 167	◦본서 후정 캐노피 설치 ◦별관(사랑의119목욕봉사실) 2층 테라스 방수공사
이태원119안전센터 서울시 용산구 이태원로 196	◦화장실 및 식당 환경개선 ◦난방용 보일러 및 배관교체
후암119안전센터 서울시 용산구 후암로 34	◦옥상 지붕층 방수 ◦사무실 출입문 및 옥상방화문 보수
이촌119안전센터 서울시 용산구 이촌로2가길 1	◦화장실 및 식당 환경개선 ◦사무실 출입문 보수
서빙고119안전센터 서울시 용산구 서빙고로67길 7	◦화장실(샤워장) 및 식당 환경개선 ◦사무실 출입문 보수

Ⅳ		세부추진계획

◈ 별관(119사랑의목욕봉사실) 및 후암119안전센터 옥상 등 방수공사

◦ 위    치

- 본서 별관 : 서울특별시 용산구 한강대로 167

- 후암119안전센터 : 서울특별시 용산구 후암로 34

◦ 공사규모 : 바닥면적 118.2㎡(별관2층테라스70.2㎡, 후암센터 옥상48㎡)

◦ 공사내용

- 옥상 기존 방수도료, 바닥타일 등 제거

- 우레탄 방수재 도표

◦ 실태사진

별관(사랑의119목욕봉사실) 2층 테라스	후암119안전센터 옥상 지붕층

◈ 본서 후정 캐노피 설치공사

◦ 위    치 : 서울특별시 용산구 한강대로 167

◦ 사업규모 : 폭4.6m×길이30m×높이4m (면적 130㎡)

◦ 공사내용 : 골조작업, 캐노피 렉산시공

◦ 실태사진

본서 후정(서측) 설치장소	본서 후정(북측) 설치장소

◈ 119안전센터 화장실(샤워장) 및 식당 환경개선 공사

◦ 위    치 : 이태원119안전센터 외 2개소

◦ 공사내용

- 이태원119안전센터(서울특별시 용산구 이태원로 196)

․ 1층 화장실(16.2㎡): 바닥(벽)타일, 칸막기 및 천정 등

․ 3층 식  당(32.4㎡): 바닥(벽)타일 및 씽크대, 노후 집기류 교체 등

- 이촌119안전센터(서울특별시 용산구 이촌로2가길 1)

․ 1~3층 화장실(33.62㎡): 바닥(벽) 타일, 칸막기 및 천정 등

․ 3층 식당(23.7㎡): 바닥(벽)타일 및 씽크대, 노후 집기류 교체 등

․ 3층 샤워장 : 순간온수기 설치

- 서빙고119안전센터(서울특별시 용산구 서빙고로67길 7)

․ 1~2층 화장실(12.6.6㎡): 바닥(벽) 타일, 칸막기 및 천정 등

․ 2층 샤워장 : 바닥(벽) 타일, 샤워기․수전 교체, 탈의실 신설 등

․ 2층 식당(25.2㎡): 바닥(벽)타일 및 씽크대, 노후 집기류 교체 등

◦ 실태사진

◈ 119안전센터 현관 출입문 등 보수공사

◦ 위    치 : 이태원119안전센터외 3개소

◦ 공사내용

- 이태원119안전센터 (서울특별시 용산구 이태원로 196)

․ 현관출입문 입구 대리석 계단 정비

․ 지하보일러실 난방용 보일러 및 노후배관 교체

- 후암119안전센터 (서울특별시 용산구 후암로 34)

․ 현관출입문 내측 출입문 이전 – 사무공간 확보

․ 옥상 출입문(방화문) 교체

- 이촌119안전센터 (서울특별시 용산구 이촌로2가길 1)

․ 사무실 샌드위치판넬 출입문(차고출입, 2층출입) 2EA 강화유리문 교체

- 서빙고119안전센터 (서울특별시 용산구 서빙고로67길 7)

․ 현관 출입문 보수

◦ 실태사진

Ⅴ		계약 및 예산집행

◈ 계약방법 : 전자공개수의계약(G2B)

◈ 사업예산 : 금80,942,000원(금팔천구십사만이천원)

※ 설계비 포함

◈ 예산과목 : 직무환경개선/소방관서 보수,보강공사/시설비(401-01)

Ⅵ		추 진 일 정

◈ 기본계획수립 .......................................... 2015. 4. 6.～ 4. 8.

◈ 기술용역 타당성심사 요청 ..................... 2015. 4. 9.～ 4.10.

◈ 설계용역 계약 ........................................ 2015. 4.20.～ 4.21.

◈ 설계용역 ................................................ 2015. 4.22.～ 5.10.

◈ 공사입찰공고 ......................................... 2015. 5.11.～ 5.18.

◈ 공사계약 ................................................ 2015. 5.19.～ 5.22.

◈ 착공/공사 ............................................... 2015. 5.23.～ 6.22.

◈ 공사완료 및 검수 .................................. 2015. 6.22.～ 6.30.

Ⅶ		기 대 효 과

◈ 시설물의 내구성 향상으로 청사 유지관리의 효율적 운영

◈ 직원 야외 휴게공간 확보에 따른 근로의욕 향상 및 근무환경 개선

◈ 식당 노후 주방설비 및 집기교체를 통한 급의 질 향상 및 위생관리 개선