투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	설계변경의뢰(벽오산 위험수목 정비공사)

1. 북서울꿈의숲관리사무소-2596(2015.4.6)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『북서울꿈의숲 벽오산 위험수목 정비공사』와 관련 위험수목 추가 정비 요청 민원이 있어 이를 처리하고자 아래와 같이 설계변경을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 북서울꿈의숲 벽오산 위험수목 정비공사

나. 공사기간 : 2015.3.24. ~ 2015.4.18.

다. 도 급 액 : 금17,843,760원

라. 도 급 자 : 경원조경(주) 대표 정진

마. 변경내용 : 위험수목 정비 대상 증가(증 11주)

※ 붙임 실정검토결과보고 참조

바. 총공사비

구 분		금 액(원)			비고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		17,843,760	20,075,000	증) 2,231,240
도급비	공급가액	16,221,600	18,250,000	증) 2,028,400
	부가가치세	1,622,160	1,825,000	증) 202,840
	계	17,843,760	20,075,000	증) 2,231,240

사. 예산과목

- 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 공원·녹지 관리수준 향상, 남산의 산하공원 운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리, 시설비

붙임 : 1. 실정검토결과보고 1부.

2. 변경설계서 1부.

3. 제비율검증표 1부. 끝.

	북서울꿈의숲관리사무소장
주무관	황서현		관리팀장	김환형		북서울꿈의숲관리사무소장	04/06 김상근
협조자
시행	북서울꿈의숲관리사무소-2600	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 월계로 173(산28-6)	/
전화	02-2289-4013	/전송	02-2289-4040	/	spinosus@seoul.go.kr	/	대시민공개