투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	성암로 토목공사 일시 중지에 따른 공사현장 점검결과 제출 요청

1. 귀 공단(사)의 일익번창을 기원합니다.

2. 토목부-6787(2015.04.03.)호와 관련입니다.

3. 위 대호와 관련 우리 본부에서 추진중인 “성암로 병목구간 개선공사”의 토목 시공사(태권종합건설)의 자금 및 경영악화로 사업을 수행할 수 없다는 공사 포기각서가 제출되어 후속업체 선정시 까지(5월중 재개 예정) 부득이 공사를 일시 중지 할 수 밖에 없으며, 이로인한 공사기간을 연기(당초 5월 ⇒ 12월 예정)할 예정임을 알려드립니다.

4. 아울러 현재까지 공사추진현황, 공사중지 기간 동안의 현장 안전관리에 대한 시공사(세명종합전력), 감독기관(서울시시설관리공단) 합동점검 실시 및 향후 추진계획을 2015.04.09(목)까지 우리 본부로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 관련공문서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시시설관리공단이사장,(주)세명종합전력 대표 오종국
주무관	박병환		건축설비과장	김영수		설비부장	04/06 박기형
협조자
시행	설비부-4028	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8628	/전송	02)3708-8659	/	pbhw2002@seoul.go.kr	/	대시민공개