문서번호	어린이병원원무과-532
결재일자	2014.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		원무과장	어린이병원장
이경주		김석태	01/13 모현희
협조
	주무관		박성규

어린이병원 발달센터 건립공사  2014년 예산 재배정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

어린이병원 발달센터 건립 예산재배정 계획

우리병원 발달센터 증축공사 관련 2014년 예산을 사업시행부서인 도시기반시설본부 건축부에 예산 재배정 처리코자 함

※ 재배정금액 : 7,000백만원(치과이전비,개발제한구역보전부담금 제외)

Ⅰ 사업개요

○ 공사명 : 어린이병원 발달센터 건립공사

○ 공사위치 : 서초구 내곡동 6-7

○ 공사규모 : 지하2층, 지상6층, 연면적 11,028㎡

○ 총 사업비 : 273억(시비 73억, 기부금 200억)

○ 2014년 예산 : 8,862백만원

Ⅱ 주요 추진현황

○ 2013.04.18 : 어린이병원 발달센터 건립 시장방침

○ 2013.05.29 : 투자심사위원회심의 완료

○ 2013.08.13 : 기부금심사위원회 심의완료(삼성200억 지정기탁)

○ 2013.10.31 : 도시기반시설본부 공사의뢰

○ 2013.12.02 : 공유재산심의회 심의 완료

○ 2013.12.18 : 개발제한구역관리계획변경 승인(국토교통부)

Ⅲ 2014년 예산현황

□ 어린이병원 발달센터건립 : 8,862백만원

(100-401-01) 시설비 : 8,320백만원

○ 어린이병원발달센터건립 : 6,458백만원

- 설계비 : 1,083백만원

- 공사비 : 5,375백만원

○ 개발제한구역 보전부담금 : 1,362백만원

○ 치과건물이전공사 : 500백만원

- 설계비 : 30백만원

- 이전공사비 : 470백만원

(100-401-02) 감리비 : 526백만원

○ 감리비 : 526백만원

(100-401-03) 시설부대비 : 16백만원

○ 시설부대비 : 16백만원

Ⅳ 예산 재배정 내역

○ 재배정액 : 7,000백만원

○ 재배정 내역

사업명	예산현황	재배정액	재배정부서
어린이병원 발달센터 건립공사	□어린이병원발달센터 건립 : 8,862백만원 0 시설비 : 8,320백만원 -어린이병원발달센터건립:6,458백만원 ·설계비 : 1,083백만원 ·공사비 : 5,3753백만원 -개발제한보전부담금 : 1,362백만원 -치과건물이전비 : 500백만원 0 감리비 : 526백만원 0 시설부대비 : 16백만원	□어린이병원발달센터 건립 : 7,000백만원 0 시설비 : 6,458백만원 -어린이병원발달센터건립:6,458백만원 ·설계비 : 1,083백만원 ·공사비 : 5,3753백만원 -개발제한보전부담금 : 0원 -치과건물이전비 : 0원 0 감리비 : 526백만원 0 시설부대비 : 16백만원	도시기반시설본부 건축부

○ 예산과목

: 어린이병원원무과, 전문특화된의료서비스제공,어린이병원진료수준제고,어린이병원발달센터건립

Ⅴ. 향후추진계획

○ 2014.01 ∼ 2014.10   기본 및 실시설계

○ 2014.12 ∼ 2017.04   공사착공 및 준공 . 끝