문서번호	녹색에너지과-7143
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		전력관리팀장	녹색에너지과장
이재복		조성태	04/07 권민
협조

에너지 자립마을 실태조사 준공 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4

기 후 환 경 본 부

(녹색에너지과)

에너지 자립마을 실태조사 준공 연기 검토보고

에너지 자립마을에 적합한 스마트그리드 시범 구축 방안을 제시 하고자 시행중인 실태조사의 준공 연기 보고 임.

□ 용역개요

○ 계 약 명 : 스마트그리드 시범사업 관련 에너지자립마을 실태조사

○ 과업기간 : 2015.03.13~2015.04.11

○ 계약업체 : (주)루트에너지 대표 윤태환

○ 계약금액 : 금10,405,000(금일천사십만오천원)

○  실태조사 범위

- 에너지 자립마을 실태조사 및 스마트그리드 청사진 정립

- 에너지 자립마을 스마트그리드 시범사업 설계

- 시범사업 이후 확산을 위한 중장기 추진 전략 수립

□ 준공기한 연기

○ 연기기간

- 당  초 : 2015.03.13.(금) ~ 2015.04.11.(토)

- 변  경 : 2015.03.13.(금) ~ 2015.04.24.(금)

○ 연기사유 : 2015년도 신규 에너지 자립마을 20여개소(미확정)의 추가 검토

○ 지체상금 부과여부 검토 : 미부과

□ 보고의견

○ 위와 같이 준공기한을 연기하여 실태조사에 내실을 기하고자 함. 끝.