문서번호	조경과-264
결재일자	2014.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
조진성	윤희숙	이성주	정상택		01/16 안영노
협 조

「백두산호랑이숲 조성공사」 동절기 공사(중지)계획

2014. 1

서울대공원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

「백두산호랑이숲 조성공사」 동절기 공사(중지) 계획

「백두산호랑이숲 조성공사」 추진과 관련 동절기 중 품질관리에 어려움이 있어 공사중지하고자 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 백두산호랑이숲 조성공사

○ 공사기간 : 2012. 12. 27 ~ 2014. 2. 28 (장기계속공사)

○ 도 급 액 : 금2,377,213,000원

○ 도급업체 : 미래종합조경(주) 주정수, ㈜신영그린시스 심재홍

Ⅱ		현안사항 및 대책

○ 공사관계자 내부검토회의 및 전문가 자문에 따른 반영요구 사항에 대한 추가 검토와 보완이 필요하여 잔여공정 추진이 지연되고 있고

○ 최근 기온이 급강하하여 포장공정 등 공사시행시 품질저하의 원인이 예상되어 동절기 중 공사를 중단하고 해동이후 재착공하고자 함

Ⅲ		조치계획

○ 동절기 공사중단 지시 및 공사기한 연장 등 후속조치 이행.  끝.