문서번호	고도정수반-2067
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장
문정주	김인규	전결 04/07 강신재
협 조
	기전설비과장		서대훈

2015년 상반기 특정관리 대상시설 정기 안전점검 계획

(구의,뚝도정수센터 고도정수처리 시설공사)

2015. 4. 7.

상수도사업본부

(고도정수반)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 상반기 특정관리 대상시설 정기 안전점검 계획

(구의,뚝도정수센터 고도정수처리 시설공사)

특정관리 대상시설로 관리 중인『구의, 뚝도정수센터 고도정수처리  시설공사』현장에 대해 재난발생 위험요인을 사전에 해소하고자, 2015년 상반기 정기 안전점검 시행계획을 수립하여 보고 드림.

추진근거(※ 재난 및 안전관리기본법)

❍ 법 제 27조(특정관리 대상시설등의 지정‧관리 등)

- 특정관리 대상시설 지정‧관리 지침 상 대형공사장에 해당 B등급으로 관리 중(총공사비 기준, 토목100억 원이상, 건축 50억 원이상 또는 연면적 만㎡이상)

※ 안전등급 우수 순서 : A(우수) > B(양호) > C(보통) > D(미흡) > E(불량)

❍ 같은법 시행령 제 34조의 2(특정관리 대상시설등의 안전등급 및 안전점검 등)

- 중점관리시설(A~C등급) → 반기별 / 재난위험시설(D~E급) → 1~2회/월 점검

❍ ’15년 특정관리대상 정기안전점검 등 세부 추진계획(시설과-1432, ’15.3.4.)

- 시설관리부서별 세부추진계획을 수립하여 시행하되 ‘국가 안전대진단 계획’에 의거 외부전문가와 합동점검 시행

점검대상

❍ 본부 시행 대형공사장 : 2개소

연번	공사명 (공사금액)	공사개요	공사기간	공정률 (’15.4.6.현재)
1	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 (190,508백만 원)	재건설 25만톤/일 고도 45만톤/일	’09.11.23. ~ ’15. 4.20.	99.6%
2	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 (230,005백만 원)	현대화 70만톤/일 고도 60만톤/일	’09.12.04. ~ ’16.12.31.	63.8%

세부 점검계획

❍ 점검일시 : ’15. 4. 9.(목)

❍ 점검항목 : ‘특정관리 대상시설 안전등급 평가 매뉴얼’ 의 시설별 안전점검 체크리스트에 따라 ‘관리영역’ + ‘시설영역’ 구분

❍ 점검방법 : 외부전문가 & 분야별 공사관리관  ⇒ 합동 점검

- 관리영역 → 외부전문가

- 시설영역 → 외부전문가, 분야별 공사관리관이 안전점검 체크리스트
(붙임2)에 따라 현장 합동 점검하고 체크리스트 작성 제출

➡ 관리영역과 시설영역 점수합계에 따라 안전등급 조정여부 결정

※ 안전등급 산정 방법

관리영역(30%)		시설영역(70%)
이력카드 관리, 안전관리자 선임여부, 비상연락망 구비, 긴급재난시 대피지침 수립, 설계도서 구비 등	+	분야별 체크리스트(Type Ⅰ)에 따라 점검 후, 평가 (토목,건축,전기,기계,가스)

안전등급	A	B	C	D	E
점수범위	100~90	75-89	60~74	50~59	50미만

❍ 점검조 편성현황

공사장	공사관리관(고도정수반, 기전설비과)				외부전문가 (건설안전기술사)	점검 시간대
	토 목	건 축	전 기	기계,가스
구의 정수센터	송병욱 (토목6) 라승보 (토목7)	심찬석 (건축6)	윤덕묵 (전기6)	박태원 (기계7)	김영동 (경동엔지니어링)	오전
뚝도 정수센터	송병욱 (토목6) 문정주 (토목7)	심찬석 (건축6)	박태식 (전기7)	유통희 (기계6)		오후

※ 현장별 건설사업관리자 및 현장대리인은 점검 시 입회

향후계획

❍ 현장별 책임사업관리자에 본 점검계획 통보

- 관리영역 점검 증비서류 등 사전 준비

❍ 외부전문가 점검 수당 지급 (고도정수처리 시설공사 시설부대비 사용)

- 지급금액 : 249,900원/인 × 1인 = 249,900원

[도시안전과-4450(’14.2.24.) 공사장 등 안전점검 강화를 위한 전문가 기동점검단 운영계획과 연계하여 엔지니어링 특급기술자 단가(2015년) 적용]

❍ 점검결과 NDMS(시도재난관리시스템) 전산입력 및 수합부서(붙임1) 제출

- 경미한 사항은 즉시 조치

- 보수가 장기간 소요되는 사항은 조치 완료시까지 지속관리

※ 수합부서 : 본부(시설안전부) → 市 도시안전본부 → 국민안전처

붙 임 : 1. 안전점검서 및 결과서 1부.

2. 안전점검 체크리스트 평가양식 1부.

3. 안전점검 체크리스트 평가방법<참고자료> 1부.

4. '14년 하반기 뚝도 현장 안전점검 체크리스트 평가결과<점검예시> 1부.  끝.