문서번호	도로보수과-3458
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		04/07 代이상하
협 조
	주무관		이상하

2015년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제1차 )

2015.  04. 07(화)

서부도로사업소

(도로보수과)

2015년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제1차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통안전(도로) 부속물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2015. 03. 06 ~ 2015. 12. 31

○ 시 공 사 : 신봉건설(주) 대표 최기병

○ 도 급 비 : 61,155,960원

□ 작업완료 보고

○ 건  명 : 2015년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사 작업지시(제1차)

○ 작업위치 : 마포구 마포로 외 20개 노선

○ 작업기간 : 2015. 03. 17. ~ 2015. 04. 10.

○ 작업내역

- 2015년 해빙기 도로부속물 청결대책 추진계획에 따라 교통안전부속물 유지보수공사 시행.

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
무단횡단금지시설 세척	4,642㎡	4,684㎡	증) 42㎡
시선유도봉 세척	978개	971개	감) 7개
안전시설비	10회	6회	감) 4회

○ 소요금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
제1차 작업지시	35,849천원	35,871천원	증) 22천원

○ 변경사유

- 무단횡단금지시설 및 시선유도봉 물량변화에 따른 작업물량 변동.

□ 향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 실제 작업완료분 내에서 기성준공 처리코자 함.

붙 임 : 1. 제1차 작업완료 내역서 1부.

2. 제1차 작업완료 도면 1부.

3. 제1차 작업완료 사진대지 1부.  끝.