문서번호	자연생태과-1275
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	산림관리팀장	자연생태과장		푸른도시국장
김승렬	강인호	김재경		01/22 오해영
협 조

2014 근교산 등산로 정비 추진계획

2014. 1.

푸른도시국

(자연생태과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	산림청 숲길등산정책팀	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	사업소 자치구 시행	)		무 □

2014 근교산 등산로 정비 추진계획

등산객의 과밀이용과 답압, 집중호우 등으로 훼손된 등산로를 자연친화적으로 정비하여 산림훼손방지 및 이용편의 제공

Ⅰ
		추진근거

산림문화․휴양에 관한 법률 제23조(숲길의 조성 등)

‘14년 산림청 숲길등산정책 사업계획

Ⅱ
		추진방향

주 등산로는 수준 높게 정비하여 등산객의 안전과 이용편의 도모, 중복 등산로 및 샛길은 가능한 적극 폐쇄하여 산림생태계 복원

경관보전 및 생태계보호를 위하여 콘크리트 구조물 등은 철거하고 돌, 흙, 나무 등 자연재료를 활용 정비(현장내 태풍피해목 등 재활용)

등산로 주변 배수로를 정비하여 집중호우시 원활한 우배수체계 구축

주민설명회, 현장소통모임 등을 개최하여 주민 의견수렴 및 참여유도

서울둘레길 등 안내체계매뉴얼 적용(디자인, 색상 등 통일성 유지)

목책제작설치 가이드라인 적용 추진

경제활성화를 위한 예산 조기집행(조기발주 및 선급급, 기성금 지급)

Ⅲ
		사업개요(총괄)

위 치 : 종로구 인왕산 등 37개산 450개 노선

규 모 : 323km

내 용 : 노면정비, 배수로정비, 전망휴게쉼터, 안내체계, 샛길폐쇄 등

기 간 : 2006. 1 ～ 2015. 12

예 산 : 47,081백만원

매봉산

청계산

관악산

서달산

개웅산

인왕산

북한산

초안산

북한산

용마산

대모산

우면산

일자산

개화산

수락산

불암산

남산

봉산

Ⅳ
		추진실적

2009이전 : 등산로 정비 140km, 사업비 14,994백만원

2010년도 : 등산로 정비 21km, 사업비 4,830백만원

2011년도 : 등산로 정비 2.5km, 사업비 320백만원

2012년도 : 등산로 정비 22.5km, 사업비 3,250백만원

2013년도 : 등산로 정비 68km , 사업비 10,636백만원

Ⅴ
		2014 추진계획

위    치 : 종로구 인왕산 등 23소

사업규모 : 48km

사업내용 : 노면․배수로정비, 전망휴게쉼터, 안내체계, 샛길폐쇄 등

사업기간 : 2014. 1 ～ 2014. 12

예    산 : 7,159백만원(국비 3,178 시비 3,981)

추진일정

□  2014. 1 ~    : 추진계획 수립(시달)

□ 2014. 2 ~ 3  : 현장소통모임 등 개최

□ 2014. 2 ~  4 : 설계용역 시행(전문가자문, 주민설명회, 설계심의 등)

□ 2014. 5 ~ 10 : 공사시행(시민의견경청모임 등 개최)

□ 2014.11 ~ 12 : 개통식, 모니터링(설문조사) 등

세부내역

기 관 별	산 명	사 업 명 ( 위 치 )	규 모 (km)	예 산 (백만원)	비 고
20개기관	25개산	27개소	48	7,159	-
종로구	인왕산	신교동 2-11 일대	3.0	350
	인왕산.사직공원	사직동 산1-6 일대	3.0	800	예결위 의원발의
중 구	매봉산	신당동 산37-225 일대	1.0	100
광진구	아차산	구의동 3-3 일대	2.6	350
중랑구	용마․망우산	면목동 산1-9 및 망우동 산57-3 일대	2.0	400
성북구	북한산	정릉3동 산87-1 일대	1.0	250
강북구	북한산	우이동 산74-1 일대	2.6	200	현장시장실
도봉구	초안산․쌍문공원	창동 산194-3 및 183 일대	2.0	300
노원구	수락․불암산	상계동 산152-4 및 중계동 산102-1 일대	4.0	500	수락․불암산 둘레길 250백만원 포함
은평구	백련산	응암1동 산7-84 일대	2.0	300
서대문구	인왕산	홍제동 산1-1 일대	2.0	200
마포구	성미․매봉산	성산동 산11-58 및 성산동 산52 일대	1.5	400	자락길 연결로 포함
양천구	용왕산	목2동 199-51 일대	1.5	200
강서구	개화․봉제산	개화동 산62-1 및 화곡본동 산43-19 일대	2.0	300
구로구	천왕․개웅산	개봉동 산66-4 및 향동 산23-1 일대	3.0	400
동작구	국사봉	상도4동 산65-159 일대	1.0	250
관악구	관악산	대학동 산56-2 일대	3.0	500
강남구	대모산	자곡동 산 46-43 일대	1.3	200
강동구	고덕산	고덕동 산93-9 일대	2.0	150
중부사업소	벽오산	번동 28-6 일대	1.5	200
서울대공원	청계산	경기도 과천시 막계동 108-10 일대	2.0	200
미정	미정	추후 확정	4.0	596	긴급복구 등 시행
-	-	-	-	13	시설부대비 등

Ⅵ
		행정사항

기술용역타당성심사 절차 이행(시행기관 ➟ 시 기술심사담당관)

□ 설계용역 추진시 기술용역타당성심사 의뢰(“적정” 판정시 용역비 재배정)

설계심의 절차 이행(시행기관 ➟ 시 자연생태과, 기술심사담당관)

□ 기관별로 설계용역 공정율 70%정도 진행시 설계심의 의뢰, 현장심의

□ 공사금액 10억 미만은 자연생태과 / 10억 이상은 기술심사담당관

계약심사 절차 이행(시행기관 ➟ 시 계약심사과)

□ 공사금액 3억(조경) 이상인 경우에 해당(계약심사 결과 반영 추진)

착(준)공보고 절차 이행(시행기관 ➟ 시 자연생태과)

□ 설계용역, 시설공사 착(준)공일로부터 10일이내(별첨양식 참조)

기타 공통 준수사항

□ 서울둘레길 등 안내체계 매뉴얼, 목책 제착 설치 가이드라인

□ 등산로 정비 매뉴얼(산림청:발간등록번호11********-*******14)

보도자료 제공, 준공(개통)식 등에 대해서는 시(자연생태과) 사전협의

붙임 : 1. 2014 근교산 등산로 조성사업 대상지 1부.

2. 착(준)공보고서(서식) 1부.  끝.

1. 2014 근교산 등산로 조성사업 대상지

종로구(인왕산)

종로구(인왕산, 사직공원)

중구(매봉산)

광진구(아차산)

고구려정길, 해맞이길, 긴고랑길 정비

중랑구(용마산, 망우산)

성북구(북한산)

강북구(북한산)

도봉구(쌍문공원, 초안산)

노원구(수락․불암산)

은평구(백련산)

서대문구(북한산)

마포구(성미산.매봉산)

양천구(용왕산)

강서구(개화산.봉제산)

구로구(개웅산.천왕산)

동작구(국사봉)

관악구(관악산)

강남구(대모산)

강동구(고덕산)

중부사업소(벽오산)

서울대공원(청계산)