문서번호	원무과-5273
결재일자	2015.4.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	서무팀장	원무과장	은평병원장
김상훈	이종민	조현	04/07 남민

청사 1층 원무팀 사무실 증축 계획

2015. 4.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

청사 1층 원무팀 사무실 증축 계획

우리병원 청사 1층 원무팀 사무실을 증축하여 환자 및 보호자에 대한 공공의료서비스를 강화하고 병원근무자의 업무효율성을 개선하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

사 업 명 : 청사 1층 원무팀 사무실 증축

위    치 : 본관 1층 원무팀 뒤편 화단 (붙임. 공사평면도 참조)

규    모 : 약 18㎡

사업기간 : 2015. 4. 10. ~ 6. 30.

사 업 비 : 금45,000,000원(금사천오백만원)

❍ 설계용역비 : 금10,000,000원(금일천만원)

❍ 공  사  비 : 금35,000,000원(금삼천오백만원)

※ 2014년 약제과 조제실 증축공사 기준 산정

공사범위

❍ 증축에 따른 철거, 건축, 전기, 설비공사

❍ 영상의학과 항온항습기 실외기 배관 이설

Ⅱ		추 진 계 획

추진내용

❍ 증축공사 시행을 위한 설계용역 발주

❍ 증축에 따른 행정처리(증축신고) : 은평구청 건축과

❍ 설계용역 결과에 따른 공사 발주(수의계약 또는 일반경쟁입찰)

❍ 공사완료 후 건축물대장 기재사항 변경 신고 : 은평구청 지적과

세부추진일정

❍ 2015. 4. 10. ~ 2015. 4. 15. : 설계용역 업체선정 및 계약

❍ 2015. 4. 16. ~ 2015. 4. 30. : 설계용역 수행(증축신고 포함)

❍ 2015. 5.  1. ~ 2015. 5. 15. : 공사발주 계획 수립

❍ 2015. 5. 16. ~ 2015. 5. 25. : 공사 업체선정 및 계약

❍ 2015. 5. 26. ~ 2015. 6. 15. : 공사 시행 및 준공

❍ 2015. 6. 16. ~ 2015. 6. 30. : 건축물대장 기재사항 변경 신고

※ 설계용역 결과에 따라 공사발주 일정 변경가능

Ⅲ		소 요 예 산

설계용역비

❍ 소요예산 : 금10,000,000원(금일천만원)

❍ 계약방법 : 수의계약 (견적제출 건축사사무소 중 최저가 업체 선정)

❍ 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 시설비및부대비, 시설비

공사비

❍ 소요예산 : 금35,000,000원(금삼천오백만원)

※ 설계용역 결과에 따라 공사비 변경가능

❍ 계약방법 : 수의계약 또는 일반경쟁입찰

❍ 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 시설비및부대비, 시설비

Ⅳ		행 정 사 항

설계용역 업체 선정 및 계약 : 4. 15.까지

공사발주 계획 수립 및 공사 업체선정 : 5월(설계용역 완료 후)

붙임 : 공사평면도 1부.