문서번호	정수과-3230
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
이용은		현인식	04/07 임정규
협조	행정관리과장		안창수
	정수시설과장		유영춘

막여과 정수시설 인계/인수 계획

2015.  4.    .

영등포아리수정수센터

(정  수  과)

막여과 정수시설 인계/인수 계획

환경부 국책사업(Eco-Star)으로 시범 건설하여 운영중인 막여과 정수시설의 원활한 인계/인수를 통하여 안정적인 정수생산 및 경영합리화를 이루고자 함

□ 막여과 정수시설 현황(시범사업 개요)

연구사업명	수처리선진화 사업단 (Eco-STAR Project) - 환경부 국책과제
분 야 명	중대형 막분리 고도정수처리시스템 개발 및 상용화
총연구기간	2004.12.01 ~ 2011.05.31 (6년 6개월)
시설용량	가압식	25,000 m3/일		㈜대우건설
	침지식	25,000 m3/일		㈜한화건설
	기 반	토목, 건축, 조경		서울시 총괄감독
사 업 비 (22,681, 백만원)	가압식	6,255백만원	(정부 5,440, 대우 815)
	침지식	5,600백만원	(정부 5,000, 한화 600)
	기 반	10,826백만원	(정부 6,604, 서울시 4,222)

□ 주요 추진 경위

○ 막여과 정수시설 설치 추진 내역

- ’04.12.         : 환경부와 협약체결(Eco-STAR Project)

- ‘06.11.17      : 막여과 시범정수장 건설 협약(연구원, 대우, 한화)

- ‘06.12.         : 막여과 시범정수장 건설 세부추진협약(연구원, 대우, 한화)

- ’07.12.         : 막여과 기반시설 착공

- ’09.07.         : 막여과 설비시설 착공

- ’10.05~’10.08 : 침지식 무부하 및 부하 시운전 완료

- ’10.09~’10.11 : 가압식 무부하 및 부하 시운전 완료

- ’11.01.05      : 침지식 막여과시설 통수

- ’11.04.01      : 가압식 막여과시설 통수

- ’11.04.25      : 막여과 준공식 및 운영관리 협약체결

(서울시, 환경부, 수처리선진화사업단, 대우, 한화)

○ 인계/인수 관련 협의(요청) 내역

- ‘14.02.11 : 협안업무 협의(본부, 환경부, 연구원, 영등포, 대우, 한화)

- ‘14.03.10 : 예산지원 요청(영등포 → 본부 → 환경부)

- ‘14.11.24 : 인계/인수 관련 협의(연구원, 영등포)

- ‘14.12.18 : 3자 실무자 회의(연구원, 영등포, 대우, 한화)

- ‘14.12.22 : 인력 충원 요청(8명, 영등포 → 본부)

- ‘15.03.12 : 인계/인수 회의(연구원, 영등포, 대우, 한화)

□ 문제점(현안사항)

○ 전문인력(운영 및 유지․보수) 부재 : 시설물 인수후 효율적인 운영곤란

- 주간에 1명을 배치하여 참여하고 있으나 실질적 운영기술을 습득하지 못함

- 중앙제어실 근무자의 경우 정수센터 생산량의 대부분을 차지하고 있는 표준 모래여과에 매진하고 있어 막여과 운영에 참여할 여력이 없음

- 전문적인 유지․보수 인력 부족으로 고장․문제 발생시 신속한 대처 곤란

※현재 운영현황

구 분		영등포정수센터	시공사(대우,한화)	비 고
운 영	주간 ․ 평일	1명(막제어실)	4명(각 2명)
	야간 ․ 휴일	중앙제어실	-	비상시 시공사 출동
유지 ․ 보수		-	자체해결(외주발주 등)

○ 기업소유에 따른 소극적 관리․운영으로 시설물 노후화 가속 및 기능저하

- 시설물 고장․부식 발생시에도 수돗물 생산에 지장을 초래하지 않는 경우 방치

- 침지식은 최근 생산능력이 50% 이하로 저하된 상태

※ 막여과시설 가동율(%, 가동율 = 생산량/용량)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015. 3월	비 고
가압식	70.9	78.6	84.1	81.6	82.5
침지식	72.0	74.9	78.0	53.8	46.1

□ 인계/인수 계획

○ 시설물 인계/인수 철저

- 인계/인수를 위한 T/F팀 구성․운영

총 괄	운 영	기 계	전 기	통 신	토 목	소 방	시설보수
이용은	박찬종 강우기 장은진	김오열 김익동	오재승 양묘식	이광만	김왕주 박응희	김오열 양묘식	박종철

- 시설의 조치 요구사항 확인 및 예비품 확보 등

○ 막여과 정수시설 운영 및 유지․보수 전문인력 확보

- 막여과 운영(보수)인력 보충 요청(건의) : 영등포정수센터 → 본부

○ 막여과 정수시설 효율적 관리 : 인력 보충전 자체인력 활용

- 운영인력 보충시까지 중앙제어실 인력 활용

구 분	근 무 자	비 고
주간 ․ 평일	막제어실(장은진) + 중앙제어실	시공사 협조 및 자문
야간 ․ 휴일	중앙제어실(막여과 운전 담당)	〃
※막여과 운전․점검 주무 : A(남정규), B(유한곤), C(강현삼), D(김용배)

- 유지․보수 인력 보충시까지 설비관리실 인력 활용

○ 인계/인수후 운영에 따른 준비

- 막여과 운영 교육(수시) : 운전방법, 비상시 대처요령 등

- 유지․보수 준비 : 유지․보수 방법 숙지 등

□ 행정사항(향후계획)

○ 인계/인수에 따른 역할 분담

구 분	업무(역할)	비 고
행정관리과	인력충원(건의) : 운영 및 유지․보수 인원
정 수 과	막여과 인계/인수 총괄 막여과 정수시설 운영
정수시설과	막여과 정수시설 유지 ․ 보수

따로붙임 : 막여과 정수시설 공정구성도 1부. 끝.

【따로붙임 : 막여과 정수시설 공정구성도】

가압식 : 원수(착수정) → 급속혼화 → 응집 → 침전 → 막여과

침지식 : 원수(착수정) → 스크린 → 급속혼화 → 응집 → 막여과

끝.