문서번호	방재시설부-4561
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	04/07 임춘근
협조
	주무관		김달용

「경의선숲길 공원조성공사」

2차공사구간 가림막 설치계획 실정보고 검토

2015. 4

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』

2차공사구간 가림막 설치계획 승인요청 검토

「경의선숲길 공원조성공사」 2차공사구간 가림막 설치계획에 대한 검토보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015 – 229(2015.03.24)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 A=84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.3

○ 공 사 비 : 11,812백만원

Ⅱ

실정보고 내용

○ 2차공사구간 가림막 설치계획

- 현장 여건을 고려하여 가림막 설치가 가능한 구간에 한하여 설치

- 2차공사 구간은 향후 공원 경계구간 공사 추진 시 설치된 가림막과 시공     간섭을 고려하여 설치와 철거가 간편하고, 이동 설치가 가능한 EGI휀스     (H파일기초+ 보조지주)로 설치

- 가림막 외측 외부디자인(시트지)은 주변 경관 저해요소와 유동인구 등을     감안하여 제한적으로 설치

○ 2차공사구간 가림막 설치수량 변경 현황

구 분	규 격	단 위	당 초	변 경	증 · 감	비 고
가설방음벽(12개월)	H=3.0m (외부디자인 포함)	m	3,570	-	(감) 3,570
EGI휀스	H=2.0m (외부디자인 제외)	m	-	958	(증) 958
EGI휀스	H=2.0m (외부디자인 포함)	m	-	170	(증) 170
소 계		m	3,570	11,128	(감) 2,442

※ EGI휀스 설치기간에 따른 손율 반영예정(3~12개월)

○ 개략공사비 검토

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급액	336백만원	100백만원	(감)236백만원

※ 실 시공 및 설치기간에 따라 정산 예정임.

Ⅲ

감리단 검토의견

○ 상기와 같이 『경의선숲길 공원조성공사』 2차공사구간 가림막 설치 계획에     대하여 검토한 결과 현장여건(시공기간 및 설치가능 구간), 공원경계 구간     시공간섭 저감, 시공성(이동설치, 시공간편)등을 고려하여 적절한 것으로    판단되며,

○ 향후 실 시공 및 설치기간에 따라 정산 예정으로 공사비는 개략 산정하여     검토한 결과 수량 및 단가 감소 등으로 약 236백만원 감액될 것으로 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 2차공사구간의 가림막 설치와 관련하여 공원경계부 시공(측구, 경계석)공사 시    이동 및 재설치가 용이한 EGI휀스(H파일기초+ 보조지주) 설치에 대한 건설    사업관리기술자의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인 통보코자 하며, 차후    설계변경시 반영토록 조치하고자 함.