문서번호	자연생태과-651
결재일자	2014.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장		푸른도시국장
손경이	안수연	김재경		01/13 오해영
협 조

2014년 하천생태복원 및 녹화사업 추진계획

2014. 1.

푸른도시국

(자연생태과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	관련자치구	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 하천생태복원 및 녹화사업 추진계획

도심 하천변 훼손된 공간과 틈새 공간에 생물들의 서식 환경을 조성하고 하천경관을 개선하여 친환경 휴식공간으로 조성

Ⅰ		사업개요

위    치 : 안양천(영등포․양천․금천), 양재천(강남), 홍제천(마포),

중랑천(중랑천 녹색브랜드화 사업은 별도 방침-7개구)

사업규모 : 116,200㎡(중랑천 제외)

사업내용 : 식생기반 조성 및 제방사면 녹화 등

사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 10

총사업비 : 1,926백만원(중랑천 제외)

연차별 추진계획(※ 세부내역 별첨, 중랑천 포함)

구 분	계	2006~2011	2012	2013	2014
하천생태복원 사 업	총82개소 1,469,978㎡	49개소 854,355㎡	7개소 45,000㎡	10개소 193,273㎡	16개소 377,350㎡
예산액(백만원)	44,155	30,187	3,800	5,499	4,669

Ⅱ		추진방향

제방의 산책로를 활용한 웰빙 공간 조성 및 식생 여건이 미약한 하천변에 갈대, 억새 등을 식재하여 하천변 경관 개선

하천변 녹지를 생태적인 공간으로 재조성하여 생물과 인간이 함께 살아가는 공간 조성

사업대상지 선정 및 모니터링, 유지관리 등에 전문가, 주민의 참여   적극 유도(기념식수, 초화류원 조성 등 기업·시민 참여 5% 목표로 추진 )

Ⅲ		세부추진계획

사업 대상지 현황

자치구별	사 업 개 요	규모 (㎡)	사 업 비 (단위 : 백만원)
			계	시설비	시 설 부대비
계	4개 하천(16개소)	377,350	4,669	4,664	5
마포구	･ 위치 : 홍제천(성산동 제방호안) ･ 내용 : 사면안정화 및 식생기반 조성 수목, 다년초화류 식재 등	3,000	200	200
양천구	･ 위치 : 안양천(오목교~양화교) ･ 내용 : 식생기반조성 및 다년생 초화식재	63,600	786	786
금천구	･ 위치 : 안양천(기아대교~광명교 금천방향) ･ 내용 : 식생기반조성 및 수목, 초화류 식재	9,600	600	600
영등포구	･ 위치 : 안양천(성산대교남단~양화교) ･ 내용 : 유해식물제거 및 수목, 초화류 식재	20,000	40	40
	･ 위치 : 안양천(신정교~양화교) ･ 내용 : 식생기반조성 및 성토작업 장미탑, 장미아치, 장미식재 등	10,000	200	200
강남구	･ 위치 : 양재천(탄천2교~영동2교) ･ 내용 : 수목 및 초화류 식재	10,000	100	100
중랑천 (7개구)	･ 위치 : 성동, 광진, 동대문, 중랑, 성북, 도봉, 노원 ･ 내용 : 중랑천 녹색브랜드화 추진	261,150	2,738	2,738
자연생태과	･ 시설부대비		5		5

추진일정 및 방법

사업추진 계획 수립․통보(자연생태과⇨시행기관): ’14. 1. 20.限

용역타당성 심사(시행기관⇨기술심사담당관): ’14. 1. 20~2. 20

설계 용역 시행(시행기관)                   : ’14. 2. ~ 5. 30

- 설계용역 추진시 우리시에 2회(중간 및 최종) 이상 추진사항 보고

- 유수소통, 치수 등에 방해가 되지 않도록 하천법 제25조『하천         기본계획』을 준수하여 사업을 추진하고, 공사착공전 시 하천관리          위원회 심의, 하천점용 협의 등 제반절차 이행

설계심의(시행기관⇨자연생태과, 기술심사담당관): ’14. 4. ~ 5.

- 설계심의는 설계 공정 70% 정도 진행 시 요청

- 설계심의 : 공사금액 10억 미만은 자연생태과,

10억 이상은 기술심사담당관

※ 2014년 설계심의는 대상지 현장에서 실시 예정

계약심사(시행기관⇨계약심사과)	: ’14. 4. ~ 5.

- 계약심사 : 공사금액 3억(조경) 이상 시 계약심사과

공사금액 3억(조경) 미만은 기관 자체 일상감사 실시

특정제품 선정위원회 심사(시행기관): 물품구매 및 공사 발주시

- 물품제조.구매의 경우

․ 특정제품의 품명당 가격이 2천만원을 초과하는 경우

․ 특정한 설비․기술이 요구되는 추정가격이 2천만원을 초과하는           물품제조의 경우 등

- 공사의 경우

․ 공사금액중 특정제품의 품명당 가격이 5천만원을 초과하는 경우

․ 특정공법의 설계금액이 1억원을 초과하는 전문공사를 포함하는 경우 등

공사시행(시행기관)	: ’14. 6. ~ 10.

공사 착․준공보고 : 발주는 6월초 이전, 준공은 최소 10월말 완료

- 사업완료 후 사업비 집행액 세부내역(지출원인행위부 등), 준공내   역서, 공사현장 사진 등을 첨부하여 제출

Ⅳ		세부 추진 방법(추진상의 유의사항)

설계단계부터 관련 전문가를 참여시키고, 깃대종 등 생물종 복원 중심의 하천사업 추진

하천이나 제방의 본래 기능에 지장을 주지 않는 범위 내에서 녹화사업을 추진

설계과정에 주민, 유관기관, 해당지역 시․구의원의 의견을 수렴하여 민원발생 등으로 인해 사업이 지연되는 사례가 없도록 조치

식목월 나무 심기 행사 등에 시민단체 등 시민참여 추진(목표 5%)

설계용역시 설계변경 등 주요사항은 우리시와 사전 협의

하천의 경관적 통일성 및 연속성을 고려하여 시설물의 디자인 및 색채 등은 『공원시설 색채디자인 가이드라인』준수

- 시설물의 재료는 자연친화적(목재, 흙, 자연석재) 소재 사용

- 번쩍거리는 광택 스테인레스나 철재 재료 사용 자제

- 시설물의 색채 선정시 자연과의 조화성을 고려하고 색상의 통일성 유지

- 현란한 원색 사용은 금하고 자연경관의 배경색채로 선택

기타 하천생태복원 사업 추진에 따른 세부사항 등은 아래의 규정 등을 참조하여 시행

- 『하천에서 나무심기 및 관리에 관한 기준(국토교통부 ’07.5.29)』

- 『생태하천 복원사업 추진지침(환경부, 2012)』

- 『서울특별시 전문시방서(조경편, 2009년)』

✔ 기념식수, 초화류원 조성 등 기업·시민 참여 5% 목표로 추진

Ⅴ		행정사항

사업추진 계획 수립․통보    : 2014. 1. 20.限

해당 시행기관에 예산 재배정 : 기관 요청시

따로붙임  1. 시설공사 업무처리 프로세스 1부.

2. 하천생태복원사업 추진현황(2006~ ) 1부.

3. 공원시설 색채디자인 가이드라인 1부.

4. 특정제품 선정절차 개선안 방침서 사본 1부.

5. 생태하천 복원사업 추진지침(환경부) 1부.

6. 하천에서 나무심기 및 관리에 관한 기준(국토교통부) 1부.

7. 현장점검 결과를 반영한 하천복원 및 녹화사업 세부조성기준 1부.  끝.