문서번호	도시철도토목부-910
결재일자	2014.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	9호선1과장	도시철도토목부장		도시철도국장
엄태용	김성호	이은상		01/23 김준기
협 조
	기획예산과장		최갑영
	경리과장		최영미
	설비계획과장		황철호
	주무관		김용선

서울 지하철 9호선 3단계

920공구 건설공사 발주계획 검토 보고(6차)

2014.  1.

도시기반시설본부

도시철도토목부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

「서울 지하철 9호선 3단계」

920공구 건설공사 발주계획 검토 보고(6차)

서울 지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사의 2014년도 예산 배정(920공구 25,800백만원)에 따른 6차공사 발주계획에 대한 검토 보고 임.

※ 관련문서 : 벽산(엔)S149EDC22-0001(2014.1.17.) : 6차 발주 설계내역 제출

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

○ 공사구간 : 송파구 석촌동 석촌역 ～ 방이동 올림픽공원 남4문 앞

○ 공사규모 : 총연장 1,390.5m(정거장 1개소, 본선 1,225.5m)

○ 계약금액 : 153,278백만원(5차 : 24,054백만원)

○ 계약기간 : 2009.12.31. ~ 2015.12.29.(5차 : ’13.02.27. ~ ’14.01.20.)

○ 시 공 사 : 롯데건설(주)-70%, 두산건설(주)-30%

○ 감 리 사 : 벽산엔지니어링(주) 외 3

□ 발주계획(6차)

○ 공사기간 : 착공일로부터 2015.1.31까지

○ 발주금액 : 25,800백만원(현금 15,800백만원, 채무 10,000백만원)

(단위 : 천원)

구 분	총 괄	기 발주		금회 발주	장래
		1~4차(준공)	5차(진행 중)	6차
발주금액	153,217,537	34,291,200	24,054,000	25,800,000	69,072,337
공사기간	2009.12.31. ~ 2015.12.29.	2009.12.31. ~ 2013.2.20.	2013.2.27. ~ 2014.1.20.	착공일 ~ 2015.1.31.

○ 공사내용

구 간	공 사 내 용	비고
934정거장	- 구조물 18,739㎥
본선 쉴드터널	- 금회 L=523m(933S1E1환기구 ~ 본선개착), 갱문설치 4개소
본선개착	- 토공굴착 15,772㎥, 버팀보 90본, Rock Bolt 738공
본선환기구	- 토공굴착 12,208㎥, 버팀보 16본, Earth anchor 199공 - 구조물 2,050㎥
기계설비	- 지열천공(934정거장 6개소)

○ 발주내역

(단위 : 백만원)

구 분	총 공사비	기 발 주 (1차 ∼ 5차)	금회발주 (6차 공사비)	잔 여 분	비고
1. 토 목
1.1 본선개착	11,385	6,219	1,401	3,765
1.2 본선터널	30,395	9,882	8,755	11,758
1.3 934정거장	20,739	9,148	4,654	6,937
1.4 본선환기구	16,252	8,120	1,071	7,061
1.5 기타	2,658	1,784	450	424
계	81,429	35,153	16,331	29,945
2. 건축	4,255	-	-	4,255
3. 전기	3,804	-	-	3,804
4.기계설비	10,227	-	122	10,105
직접공사비 계	99,715	35,153	16,453	48,109
간접공사비 및 기타	41,368	19,546	7,207	14,615
물가변동	12,135	3,646	2,140	6,349
총공사금액	153,218	58,345	25,800	69,073	‘14년 기준 예산투입율:55%

○ 공사 관계자 현황(6차)

구 분	소 속	직 명	성 명	비 고
설 계 자	벽산엔지니어링(주)	책임감리원	서 경 석
심 사 자	벽산엔지니어링(주)	비상주감리원	최 성 규
확 인 자	벽산엔지니어링(주)	대 표 이 사	함 영 승
공사관리관	도시기반시설본부 (도시철도토목부)	지방시설주사	김 용 선
		지방시설주사보	엄 태 용
	도시기반시설본부 (도시철도설비부)	지방공업주사보	최 경 수	기계설비

□ 검토결과

○ 지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사의 6차분 발주계획을 검토한 결과, 공사 발주구간 및 작업공종이 공정추진의 연속성과 예산범위를 고려하여 적정하게 산정된 것으로 판단됨

□ 조치계획

○ 920공구 책임감리원이 요청한 대로 6차분 공사를 발주코자 함

- 6차 공사비 : 25,800,000천원, 공사기간 : 착공일로부터 2015.1.31.까지

첨  부 : 1. 6차공사 발주개요 및 공사집행계획 1부.

2. 6차공사 책임감리 검토의견서 1부.

3. 6차공사 설계서 1부.

4. 6차공사 발주현황도 1부.   끝.