문서번호	119특수구조단-1654
결재일자	2014.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	소방항공대장	119특수구조단장		소방재난본부장
김봉수	권오덕	최응섭		01/24 권순경
협 조
	조직경영팀장		김윤섭
	행정지원팀장		최성희
	담당자		김동오

2014년 소방헬기 엔진오버홀 예산집행 계획

119특수구조단 소방항공대

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2014년 소방헬기 엔진오버홀 예산집행계획

○ 효율적이고 체계적인 예산집행을 통하여 소방헬기 대응능력 향상과 위험요소 사전제거에 따른

안전운항에 만전을 기하고,

○ 소방헬기의 체계적인 관리에 따른 정비효율성 및 가동율 향상으로 긴급임무에 대비한 항공대응

능력을 향상시키고자 함

Ⅰ

관 련 근 거

□ 119특수조단-541(2014.1.8.)호 「2014년 소방항공대 예산집행 추진계획」

□ 소방행정과-35352(2013.12.31.)호「2014년도 세입․세출 예산편성 결과 알림」

Ⅱ

엔진오버홀 현황

□ 오버홀 대기 엔진

○ 엔진형식 : ARRIELIC2

○ 일련번호 : 12282

○ 정비공장 : 엔진 제작사 (터보메카) 호주 공장

※ 오버홀 완료 후 예비엔진으로 운용

Ⅲ

2014년도 소방헬기 엔진오버홀 예산편성 내역

□ 사업비(119특수구조단 소방항공대)

예산과목		예산액(원)	비고
소방항공대운영	공공운영비	809,317,000

□ 세부 예산 산출내역

사업명	품 목	규격번호 및 용도	금액(원)	비 고
계			809,317,000
소방헬기 엔진오버홀 수리	헬기(AS365N2) 엔진 오버홀 (S/N : 12282)	수리대금(물품대)	708,000,000
		운 송 료	9,277,000
		관세 (3%)	21,240,000
		부가가치세 (10%)	70,800,000

Ⅳ

2014년도 예산집행 세부 추진 계획

□ 추진 기간 : 2014년 2월 ~ 9월 (8개월간)

예산항목	추 진 내 용	2014
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
소방헬기등 운영관리/ 공공운영비	국외 엔진 공장 입고
	국외 엔진 오버홀 계약 및 진행

□ 세부 추진계획

시장조사	2014. 1. 27. ~ 2. 10.(2주간)
⇩
엔진 운송계약 체결 및 운송 - 계약방법 : 전자수의계약 - 계약법령 : 지방계약법 시행령 제 25조 및 제30조 - 인수기한 : 계약일로부터 14일 이내	2014. 2. 10. ~ 3. 10.(4주간)
⇩
E&I 실시 및 오버홀 계획 수립 ※ E&I(EXAM & INSPECTION) : 호주 터보메카 직접 입회하여 현장 검사 및 워크숍 과정을 거쳐 상호 확인 하에 교환 및 수리 품목을 결정, 정확한 결함조사 와 수리품목을 공동 확인. ※ 2014년 공무국외여행 계획에 의거 정비사 2명 현지공장 출장입회(소요예정액 : 약4,700,000원)	2014. 3. 10. ~ 5. 12.(10주간)
⇩
조달청 외자 계약의뢰 - 계약방법 : 조달청 수의계약 - 계약법령 : 지방계약법 시행령 제 25조 제1항 제4항 바, 타목 바목 : 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우 타목 : 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우 - 계약업체 : 사프란 터보메카 호주공장 - 납품기한 : 계약일로부터 90일	2014. 5. 12. ~ 5. 26(2주간)
⇩
용역 추진 및 계약	2014. 5. 26. ~ 6. 30.(6주간)
⇩
용역수행	2014. 6. 30. ~ 8. 30.(9주간)
⇩
엔진오버홀 검수․대금지급	2014. 9. 1. ~ 9. 12.(2주간)

끝.