투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고승인(부단수 천공 추가 2개소))

1.업무지시현장 :  천호대로(광나루역) 확장 공사 (주)수성엔지니어링

2.작 성 일 자  : 2015-04-07 00:04:00

3.지 시 내 용

가. 천호수 제2015-127(‘15.3.24)호와 관련입니다.

나. 위호와 관련하여 “상수도 밸브 고장에 따른 부단수 차단 시공” 실정 보고 승인건에 대하여 별첨과 같이 승인 조치하오니 책임감리원은 우리본부 설계변경  자문위원회(소위원회)를 거쳐 설계변경 적용 조치하여 주시기바랍니다.

끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

- 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송

후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							김동현			교량건설과장					04/08 이동훈
협조자
시행			토목부-7046									(						)		접수											(						)
우	100-777					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩12층 토목부															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2576						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개