문서번호	자연생태과-1543
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장		푸른도시국장
이영일	안수연	김재경		01/27 오해영
협 조

2014년 단절된 녹지 연결로 조성사업 추진계획

2014. 1

푸른도시국

(자연생태과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	자치구	)	무 □

2014년 단절된 녹지 연결로 조성사업 추진계획

○ 도로개설 등으로 인해 단절된 녹지축을 연결하여 야생동물의 이동 통로 확보 및 생물종 다양성을 증진하고,

○ 서울둘레길 및 자락길 등 기존 산책로와 연계 조성하여 공원이용 시민 서비스 제공

Ⅰ		추진근거

자연환경보전법 제45조 및 자연환경보전법시행규칙 제28조

도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙 제18조

환경친화적인 도로건설 지침('10.5, 환경부.국토해양부)

조경설계기준 제24조 생태통로('07, 국토해양부)

도로의 구조시설 기준에 관한 규칙 제43조

Ⅱ		사업개요

위    치 : 2개소 – 산골고개(은평구 녹번동), 서오능고개(은평구 갈현동)

규    모 : 산골(L=65m,B=11m), 서오능(L=70m,B=10~30m)

사업내용 : 녹지연결로 설치(산골고개), 기본계획 용역(서오능고개)

사업기간 : 2014. 1 ~ 12

사 업 비 : 5,295백만원(산골고개 사업비 5,159, 서오능고개 용역비 100)

Ⅲ		추진방향

둘레길 및 자락길 등 기존사업과 연계하여 사업효과 극대화

연결 대상지 주변과 유사한 생물서식환경 조성

경관, 비용, 시공성 등을 종합적으로 고려한 유형선정

Ⅳ		추진계획

추진개요

사 업 명	사 업 개 요	사 업 비 (백만원)	비고
계	2개 사업	5,259
산골고개 녹지 연결로 조성사업	ㅇ 위치 :은평구 녹번동 산1-18 일대 ㅇ 규모 : 생태교량(폭13.6m, 연장55m), 산책로 835m 등 생태연결로 조성 ㅇ 내용 : 연결로 조성, 수목식재 등 - 책임감리 용역 시행 ㅇ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 10.	5,159 ㅇ ‘13년 이월 : 4,359 ㅇ ‘14년 추가 : 538 ㅇ 감리용역비 : 262
서오능고개 (봉산-앵봉산간) 녹지 연결로 설치 타당성 및 기본계획 용역	ㅇ 위치 : 은평구 갈현2동 산131-22 일대 ㅇ 규모 : 생태교량(폭10~30m, 연장70m) ㅇ 내용 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 - 투자분석, 교통·환경생태성 조사 - 기본구상 및 기본계획 등 ㅇ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 11	100	타당성 조사 및 투심결과 등에 의거 사업추진

추진방법

- 사업시행(산골고개)

․ 사업총괄(예산 확보 및 총괄) : 자연생태과

․ 공사시행 : 자치구(은평구청 토목과․공원녹지과)

․ 유지관리 : 자치구(은평구청 토목과․공원녹지과)

- 용역시행(서오능고개)

․ 사업총괄(예산 확보 및 총괄) : 자연생태과

․ 용역시행 : 자치구(은평구청 토목과․공원녹지과)

세부 추진사항

- 추진과정에 주민, 유관기관, 전문가, 해당지역 시․구의원의 의견을 수렴하여 민원발생 등으로 인해 사업이 지연되는 사례가 없도록 조치

- 설계용역 및 사업시행시 주요변경 사항 등은 우리시와 사전 협의

- 구조물 설치 공사의 난이도 등을 감안하여 정기적(해빙기, 하절기)으로 기술전문부서(기술심사담당관) 현장점검(의뢰) 및 자체 점검 실시

추진일정

【산골고개 공사시행】

- 감리용역발주	‘14. 2월

- 공사착수	‘14. 2 ~ 3월

- 공사현장 점검(교통대책 및 안전 등 현장 점검 3~4회 실시)	‘14. 3 ~ 10월

※ 토목구조(안전분야) 전문가 참여(기술심사담당관 대형공사 현장점검 대상사업 포함 의뢰 및 자체 점검 실시)

- 사업준공	‘14. 10 ~10월

【봉산고개 용역시행】

- 기술용역 타당성심사	‘14. 2월

- 용역발주	‘14. 3 ~ 4월

- 보고회(3회) 개최(착수, 중간, 준공)	‘14. 4 ~ 9월

- 투․융자심사	‘14. 7 ~ 9월

- 용역준공	‘14. 10~11월

Ⅴ		행정사항(시행기관)

시행기관

- 사업 추진사항에 대한 착․준공 보고서 제출

- 시행기관은 용역 추진과정에 대한 보고회 개최(3회) 자료 제출.

현장점검 전문가 자문시 수당지급(건설기술심의 위원 자문수당 지급기준 적용)

※ 대상지 위치도

산골고개 백련근린공원 북한산도시자연공원 사업대상지
산골고개(백련산-북한산)	서오능고개(봉산 – 앵봉산간)

끝.