투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	서남권야구장 건립공사 계약변경(총차, 7차) 계약요청

1. 서남권야구장 건립공사 “총차 및 7차 공사 계약변경 보고(건축부-3880호, 2015.04.06)”와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인「서남권야구장 건립공사」에 대하여 다음과 같이 공사계약 변경(총차, 7차) 공사계약을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서남권야구장 건립공사

나. 계 약 자 : 현대산업개발(주)컨소시움

다. 계약요청 내용

1) 총차 변경                                              (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계약금액	168,581,916	195,110,773	(증)26,528,857
공사기간	‛09.2.4~ ‛15.6.30	‛09.2.4~ ‛15.6.30	변경없음

※ 책임감리제 감사결과에 따른 단열재 선시공비 기성금 지급(6차-3회)시 감액분(98,718천원) 반영

2) 7차 변경                                               (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계약금액	58,871,680	85,499,255	(증)26,627,575
공사기간	‛14.5.12~ ‛15.6.30	‛14.5.12~ ‛15.6.30	변경없음

※ 예산과목 : 문화관광디자인본부 체육진흥과, 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전,

서남권지역 돔야구장 건립(교통대책 포함), 서남권 돔야구장 건립, 시설비

따로붙임  1. 방침서 1부.

2. 설계 내역서(총차, 7차) 각1부.

3. 공정표(총차, 7차) 각1부.  끝.

	건축부장
주무관	김대식		건축총괄과장	강성욱		건축부장	04/09 김우성
협조자	경리과장	代김용범
시행	건축부-4088	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2609	/전송	02-3708-2659	/		/	부분공개