투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재[점등형 표지병(매립식)] 납품기한 연기 요청

1. 도로보수과-2670(2015.03.18)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행 중인 『청계천 자전거우선도로 설치공사』에 소요되는 관급자재[점등형 표지병(매립식)] 납품기한을 아래와 같이 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 관급자재 구매[점등형 표지병(매립식)]

나. 납품요구번호 : 12-15-2-15429-00

다. 계 약 자 : ㈜미라클산업 김궁철

라. 납품기한 연기

1) 당 초 : 2015. 04. 13

2) 변 경 : 2015. 06. 30

마. 변경사유 : 청계천 자전거우선도로 공사가 주변상가 민원으로 인하여 잠정적으로 연기됨에 따라 관급자재 납품기한을 연기코자 함.  끝.

	도로보수과장
주무관	권세봉		주무관	이상하		도로보수과장	04/09 代이상하
협조자
시행	도로보수과-3586	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203(상암동 825번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8359	/전송	300-8364	/	se1212@seoul.go.kr	/	대시민공개