문서번호	조경과-5077
결재일자	2015.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경관리팀장	조경과장
박혜선		조윤래	04/09 이원영
협조

2015년 주민참여 예산사업

(재활용정거장 주변 꽃․나무 식재사업) 검토보고

푸른도시국

(조 경 과)

2015년 주민참여 예산사업

‘재활용정거장 주변 꽃․나무 식재사업’검토보고

마포구에서 제출한 2015년 주민참여 예산사업 ‘재활용정거장 주변 꽃․나무 식재사업’과 ‘주민 제안내용’의 동일 여부를 검토하고 아래와 같이 보고함.

□ 추진근거

○ 서울특별시 주민참여예산제 운영조례(조례 제5670호)

○ 2015 주민참여예산사업 추진절차 등 관련사항 알림(재정관리담당관 2015.1.12.)

○ 재활용정거장 주변 꽃․나무 식재사업 추진계획(마포구 공원녹지과 2015.3.27.)

□ 제안 사업개요

○ 사 업 명 : 재활용정거장 주변 꽃․나무 식재사업(주민참여)

○ 대 상 지 : 마포구 성산1동 재활용정거장 21개소 주변 공간

○ 사업기간 : 2015. 3. ~ 4.

○ 사 업 비 : 금12백만원

○ 사업내용 : 상습무단투기지역에 화분(플랜터)설치 및 꽃․나무 식재

□ 검토결과

검토항목	실 행 계 획	주 민 제 안	검토결과
대 상 지	· 재활용정거장 21개소 화분 42개 설치 ※ 개소당 화분 2개 설치	· 재활용정거장 20개소 화분 50개 설치	대상지 증(1개소) 설치 화분수 감(8개)
사업기간	· ’15. 3. ~ 4.	· ’15. 4. ~ 10.	4 ~ 5월 설치 완료
사 업 비	· 12백만원	· 12백만원	적정
사업내용	· 화분 설치 및 꽃․나무 식재	· 화분 설치 및 꽃․나무 식재	반영

□ 보고자 의견

○ 마포구의 ‘재활용정거장 주변 꽃․나무 식재사업 추진계획’을 검토한 결과 주민참여 예산사업의 제안 대상지보다 계획 대상지 개소는 1개소 확대, 설치 화분은 8개 감소하였으나 주민의견을 반영한 결과이며 기존 사업취지 및 내용과 동일하므로 실행계획대로 추진하고자 하며,

○ 사업기간은 4월 중 설치 완료할 계획이었으나 주민의견을 수렴하여 화분 디자인 및 꽃종을 확정하는 데 다소 시간이 소요되고 있으므로 5월로 연장하고자 함.

○ 지정 위치에 화분을 배치하는 단순 사업이므로 설계심의는 생략하고 화분 디자인, 꽃종, 화분배치 도면, 현황사진 등을 포함한 세부계획서를 검토 후 사업비를 교부하고자 함.

붙임 : 1. 2015년 주민참여 예산사업 추진절차 등 관련사항 알림 1부.

2. 사업 추진계획서 1부.

3. 주민참여 예산사업 추진절차 1부.  끝.