2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(패션박물관 건립 타당성 조사 학술용역)

1. 문화융합경제과-3974(2015.4.9.)호와 관련입니다.

2. 패션박물관 건립 타당성 조사 학술용역과 관련하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 패션박물관 건립 타당성 조사 학술용역

나. 계약기간 : 2015. 1. 15 ~ 2015. 4. 15

다. 계약업체 : 숙명여자대학교 산학협력단

라. 변경사항 : 계약기간 연장

－  당초기간 : 2015. 1. 15 ~ 2015. 4. 15

－  변경기간 : 2015. 1. 15 ~ 2015. 5. 31

※ 금액변경 없음 : 업체에 귀책사유가 있다고 볼 수 없어 지체상금 면제

붙   임. 1. 패션박물관 학술용역 변경계약 체결계획 1부.

2. 준공기한연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	문화융합경제과장
주무관	김현정B		패션산업팀장	김수현		문화융합경제과장	04/09 박대우
협조자
시행	문화융합경제과-3994	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-2603	/전송		/	iluvseoul@seoul.go.kr	/	부분공개(5)