문서번호	한양도성연구소-359
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	한양도성연구소장	역사박물관장
조은주	박상빈	01/29 강홍빈
협 조	경영지원부장		김소영
	학예연구부장		박현욱
	총무과장		연규승
	시설과장		연규승
	전시과장		정명아
	교육대외협력과장		사종민
	조사연구과장		최형수
	유물관리과장		허대영
	보존과학과장		양필승

2014년 한양도성전시관 개관특별전 개최 계획(안)

2014. 1

서울역사박물관

(한양도성연구소)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 한양도성전시관 개관특별전 개최 계획(안)

한양도성전시관의 개관에 맞추어 최근 발굴된 남산 회현자락 일대의 한양도성 발굴성과를 공개하는 개관특별전을 개최하여 서울 한양도성이 가지고 있는 세계문화유산으로서의 진정성과 가치를 조명하고자 함

Ⅰ				전시개요

○ 전 시 명 : 서울 한양도성 발굴유물(남산 회현자락) 특별전(가제)

○ 전시장소 : 한양도성전시관 1층 특별전시실(서울디자인지원센터 내)

○ 전시기간 : 2014. 4. 17(목) ~ 6. 15(일)

○ 전시내용 : 최근 발굴된 남산 봉수대지․남산 서울, 한양도성(회현구간) 발굴성과 소개

○ 개 막 식 : 2013. 4. 17(목)

○ 소요예산 : 162,000천원

Ⅱ				추진방향

○ 남산 서울, 한양도성(회현구간)의 최근 발굴조사 성과 공개

○ 유네스코 세계문화유산 OUV인 ‘서울 한양도성의 진정성’을 입증함으로써 세계문화유산 등재 작업에 기여

○ 좁은 전시공간을 효율적으로 활용하고, 전시물의 이해도를 높이기 위해 ‘유물-모형-영상’을 유기적으로 결합하여 전시물 구성

○ 한양도성전시관의 개관에 맞추어 개최함으로써 전시 홍보 효과를 높임

○ 전시성과물을 향후 한양도성전시관 상설전시실 콘텐츠로 활용

Ⅲ				전시구성

구 분		전시내용	주요 전시물
part1 (도입부)		○ 특별전을 열며 ○ 목멱산(기본 정보, 지명유래 등) ○ 연표(한국사 - 서울사 - 한양도성사)	남산 레고모형, 그래픽패널
part2 (발굴 성과)	2-1	○ 한양도성 발굴 연표 ○ 한양도성 전체 발굴 성과 ○ 남산 봉수대지 조사(2008년) - 발굴성과 / 영조대 성랑 ○ 아동광장 발굴조사(2009년) - 발굴성과 / 황국식민서사지주비	그래픽 패널, 발굴유물(금위영 명문기와, 진단구, 반방전 등)
	2-2	○ 백범광장(2010년) - 발굴성과 / 축성방법 - 판축 뒤채움은 토성의 흔적인가?	성벽 발굴모형, 그래픽패널, 발굴유물(토기, 진단구 등)
	2-3	○ 중앙광장(2013년~) - 발굴성과 / 조선신궁 ○ 성벽 찾는 방법 - 어떻게 묻혀 있는 성벽을 찾았을까요? - 시굴과 발굴 과정	그래픽패널, 발굴유물(조선신궁 화강암 석재, 명문기와 등)
part3 (훼손과 치유)		○ 남산 훼손사 연표 ○ 일제강점기 : 한양공원(1910), 조선신궁(1925), 식민서사지주비(1937) ○ 해방이후 : 이승만동상(1956), 국회의사당 건립부지 조성(1958) ○ 치유 : 남산 제모습찾기(1991), 남산르네상스(2009)	그래픽 패널, 영상, 근대기 사진첩 등 유물

Ⅳ				추진일정

□ 진행사항

○ ‘13. 12.  5                : 2014년도 개관특별전 준비계획(안)

○ ‘13. 12. 13 ~ ’14. 1. 2  : 전시설계

○ ‘13. 12. 18  ~’14. 2. 15 : 전시모형(남산 레고모형) 제작

□ 향후 추진일정

○ ‘14. 1. 27          : 전시계획안 수립

○ ‘14. 2. 10 ~ 3. 20 : 영상 및 모형 등 전시물 제작

○ ‘14. 3. 21 ~ 4. 16 : 전시유물 운송 및 전시물 설치, 홍보물·도록 제작

○ ‘14. 4. 17           : 전시개막(※ 상설전시실 개막행사와 연계)

○ ‘14. 4. 18 ~ 6. 15 : 전시운영

○ ‘14. 6. 16 ~ 6. 30 : 전시 철거 및 유물 반납

※ 전시기간은 상설전시실 개관에 따라 변동될 수 있음

Ⅴ				도록 제작

○ 규격 : 국배판 변형

○ 면수 : 160면 내외

○ 용지 : 표지디자인 및 이미지 인쇄에 적합한 용지로 추후 결정

○ 제본 : 반양장 제본 및 표지 날개 접지

○ 발행부수 : 1,000부

○ 배포계획

구 분	수량	비고
무상배포	800부	기본납부 150부, 유관기관 200부, 대외교류 220부, 홍보용 200부, 보관용 30부
유상배포	200부	판매가격 추후 결정

Ⅵ				소요예산

○ 소요예산 : 162,000천원

○ 예산과목 : 서울역사박물관, 역사와 문화의 복합공간 창조, 한양도성전시관 운영, 한양도성전시관․연구소 운영, 사무관리비(201-01)/공공운영비(201-02)/행사운영비(201-03)/행사관련시설비(401-04)

(단위 : 천원)

구분	예산액	예산과목
		통계목	편성목
전시시설물 제작 및 설치	53,000	행사관련 시설비(100-401-04)	시설비
	10,000	사무관리비(100-201-01)	일반운영비
전시그래픽 및 사인 제작	21,000	사무관리비(100-201-01)	일반운영비
전시영상 제작	20,000
전시모형 제작·설치	20,000
전시도록 및 리플렛 제작	30,000
전시보험료, 홍보물 발송비용 등	3,000	공공운영비(100-201-02)
홍보물(포스터, 초대장) 제작 및 개막행사	5,000	행사운영비(100-201-03)
총계	162,000

○ 예산집행

- 전시시설물 제작·설치 : 전자공개입찰

- 전시그래픽 및 사인 제작, 전시영상 제작, 전시모형 제작·설치, 전시도록 및 리플릿 제작 : 소액수의계약

※ 추진근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5조(대통령령 제24860호, 2013.11.20)

- 그 외 기타 경비 : 500만원 이하 일상경비로 교부받아 신용카드 결제 및 계좌 입금

Ⅶ				행정사항

○ 총무과 : 예산 및 행정지원

○ 시설과 : 홈페이지 공지 및 홍보, 개막식 행사지원

○ 교육대외협력과 : 보도자료 배포 등 각종 홍보지원

○ 조사연구과 : 남산 회현자락 발굴성과 자료에 대한 협조

○ 유물관리과 : 전시유물 촬영 및 대출 협조, 전시유물 및 소장유물 사진 제공

○ 보존과학과 : 전시유물 보존처리 및 운송 시 습도 유지 등 환경 관리

Ⅷ				성과지표

○ 18. 박물관전시회 운영 및 기획전시