문서번호	문화융합경제과-3974
결재일자	2015.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	패션산업팀장	문화융합경제과장
김현정B	김수현	04/09 박대우

패션박물관 학술용역 변경계약 체결계획

2015.  4.

경제진흥본부

(문화융합경제과)

패션박물관 학술용역 변경계약 체결계획

도면 복구작업 등으로 인해 기존 계약기간내 완공이 불가함에 따라 패션박물관 학술용역 현 계약기간을 연장하고자 함

□ 용역개요

○  계 약 명 : 패션박물관 건립 타당성 조사 학술용역

○  계약업체 : 숙명여자대학교 산학협력단

○  계약금액 : 금삼천팔백만원(￦38,000,000)

○  계약기간 : 2015. 1. 15 ~ 2015. 4. 15

○  주요내용 : 패션박물관 건립 기본방향 수립 및 운영방안 마련,

국내외 사례분석을 통한 타당성 검토, 건립입지 분석 등

□ 변경내용

○  계약기간 변경

－  당초기간 : 2015. 1. 15 ~ 2015. 4. 15

－  변경기간 : 2015. 1. 15 ~ 2015. 5. 31(1개월 15일 연장)

	< 기간연장 사유 >
○ 건립입지 분석을 위한 박물관예정지 도면 수령지체 － 침수로 인한 도면 건조작업에 상당 시간이 소요됨에 따라 15. 4. 6일 박윤수 디자이너로부터 도면수령 후 숙명여자대학교 산학협력단에 15. 4. 6일 전달 ※ 박윤수 디자이너 간담회시 도면 침수사실 확인(’15. 2. 27) ○ 침수로 인해 식별이 어려운 도면에 대한 캐드(CAD) 복구 작업 필요 － 복구 작업에만 2주가량의 시간이 소요될 것으로 예상됨

○  금액변경 : 없음

※ 기증자인 박윤수디자이너로부터 도면 수령이 지체됨에 따라 계약기간 연장이 불가피한 상황으로 계약업체에 귀책사유가 있다고 볼 수 없어 지체상금은 면제함

□ 행정사항

○  변경계약 체결의뢰(문화융합경제과 → 재무과) : 2015. 4. 9 예정