문서번호	교통운영과-6854
결재일자	2015.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	중앙차로팀장	교통운영과장
오인숙	김종호	04/09 강진동

충정로 중앙버스전용차로 모니터링용역

설계변경 및 준공보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  4.

도시교통본부

(교통운영과)

충정로 중앙버스전용차로 모니터링 용역

설계변경 및 준공보고

충정로 중앙버스전용차로 도입 후 교통환경 변화로 인한 시민불편 최소화 및 교통영향분석을 통해 사업시행 효과를 극대화시키고자 시행한 모니터링용역 추진중 실시설계 미시행에 따른 설계변경 사유가 발생되어 이를 조정하고 준공 처리코자 함

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명 : 충정로 중앙버스전용차로 모니터링 용역

□ 계약금액 : 43,419,700원

□ 계 약 자 : ㈜태조엔지니어링 대표 한명식

□ 계약기간 : ‘14.6.18~‘15.4.13

【과업 구간】

Ⅱ		추진 경위

□ ‘14.6. : 용역 계약 및 착수

□ ‘14.6~: 용역 추진

○ 현장 조사, 기본설계 도면 작성, 경찰 협의, 교통영향분석 등

□ ‘15.1. : 용역 중간보고

□ ‘15.4. : 용역 최종보고

Ⅲ		용역 내용

□ 차량간 엇갈림 최소화 방안 마련을 통한 안전성 확보

○ 아현삼거리~충정로삼거리구간 버스전용 우회전처리를 위한 현장조사 및 기본설계 시행

- 아현삼거리 버스전용 좌회전 처리→충정로 삼거리 버스전용 우회전 처리

【아현삼거리(변경 전)】	【아현삼거리(변경후)】
【충정로삼거리(변경 전)】	【충정로삼거리(변경후)】

□ 우회도로 안내체계 보완을 통한 시민혼란 최소화

○ 이면도로 내 우회도로 안내표지, 유턴금지 노면표시 등 설계 보완

○ 개통대비 정류소별 정차노선 안내 및 우회도로 안내입간판 문안작성

【아현역 교차로 주변】	【충정로지구대 주변】

□ 개통 후 집중 모니터링을 통한 조기 안정화에 기여

○ 개통일부터 일주일간 현장 모니터링을 위한 주행조사 실시

- 버스 및 일반차량(승용차) 주행속도 조사 실시

- 교통 정체지점 모니터링 후 개선방안 도출(정지선 후퇴, 유도선 설치 등)

□ 중앙버스전용차로 시행전후 효과 분석

○ 시행전후 효과분석 결과

- 시행전 대비 통행속도, 이용객수 등이 증가하고, 통행시간은 감소함

구 분		시행 전	시행 후	비 고
통행속도	버 스	12.9km/h	18.3km/h	증 41.9%
	일반차량	14.6km/h	15.4km/h	증 5.5%
버스 이용객수		16,148인/일	17,095인/일	증 5.9%
버스 통행시간		10분 01초	6분 03초	감 4분
버스 정류장 용량		-	+162~186대/시	여유
교차로 교통량	아현삼거리	7,148대/시(LOS D)	8,056대/시(LOS D)	증 12.7%
	충정로삼거리	7,600대/시(LOS C)	7,759대/시(LOS D)	증 2.1%

※ 분석시간대 : 오전첨두시(08~09시)

<분야별 분석결과>

【일반차량 통행속도】	【버스 통행속도】
【버스 이용객수(시행 전】	【버스 이용객수(시행 후】
【버스 정시성(시행 전】	【버스 정시성(시행 후】
<아현교차로>	<아현교차로>
【교차로 교통량(시행 전】	【교차로 교통량(시행 후】

Ⅳ		특이 사항

□ 사업구간 내 주요교차로에 앞막힘 예방제어시스템 도입 제외

○ 서울지방경찰청과 협의시(‘14.1) 주요 교차로 3개 지점에 앞막힘 예방제어 시스템 도입할 계획이었으나, 모니터링 결과 교차로내 꼬리물림이 발생되지 않고 있어 앞막힘 예방제어기법 도입 제외

※ 대상 교차로 : 아현역교차로, 아현삼거리, 충정로삼거리

【아현역교차로】	【아현삼거리】	【충정로삼거리】

Ⅲ		조치 계획

□ 계약사항 변경 : 실시설계 미시행에 따른 용역금액 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
용역 기간	‘14.6.18~’15.4.13	‘14.6.18~’15.4.13	변경 없음
용역 금액	43,419천원	23,661천원	감 19,758천원

○ 용역 발주전 중앙버스전용차로 공사 담당기관인 도시기반시설본부(이하 도기본)와 협의 결과, 준공 후 변경사항에 대한 실시설계 수행이 불가한 것으로 협의되어 본 과업에 실시설계를 포함하여 발주함.

□ 설계변경 사유

○ 공사 준공 전(‘14.11월말)까지 발생된 변경사항의 대부분을 도기본에서 공사를 시행하였기 때문에 본 용역에서는 실시설계를 제외한 기본설계만 수행함.

Ⅳ		향후 계획

□ ‘15.4 : 용역 검수 및 준공

붙임 : 1. 변경 설계서 1부.

2. 변경 설계내역서 1부. 끝.