문서번호	전시과-1385
결재일자	2015.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	전시과장	학예연구부장	서울역사박물관장
김양균	정명아	박현욱	04/09 강홍빈
협 조
	경영지원부장		박형중
	총무과장		연규승
	시설과장		국중연
	교육대외협력과장		허대영
	조사연구과장		최형수
	유물관리과장		사종민
	보존과학과장		양필승

- 백인제家 ‘住생활 전시관’-

전시 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015

서울역사박물관

(전시과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	한옥보존, 고건축, 근대생활사 분야 전분가	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

백인제家 ‘住생활 전시관’ 전시분야 추진 계획

북촌의 대표적인 한옥 중 하나인 가회동 백인제가 내에 한옥의 생활상을 복원하는 전시연출을 통해 도시한옥의 멋과 아름다움을 국내외 관람객들에게 생생하게 소개하고자 함

Ⅰ	전시 개요

추진기간 : 2015. 4월 ～ 12월

전시개막 : 2015. 9월 초

전시장소 : 가회동 백인제가옥(서울특별시민속문화재 제22호)

(면적 대지 2,460㎡, 건물 545.52㎡)

전시내용 : 근대한옥의 역사, 백인제가의 특징, 백인제가 주인 생활상,

서울시 한옥보존 정책

소요예산 : 628백만원

Ⅱ	추진 방향

북촌 한옥마을의 대표적인 문화자산으로서의 전시기능과 함께 원형의 복원, 보존을 병행할 수 있도록 조성

북촌한옥의 아름다운 멋과 생생한 생활상을 보여주는 전시 추구

주변한옥 및 문화시설과 연계하면서 동시에 차별화 추구

이야기가 있는 전시 구성을 통한 친근한 한옥이미지 구축

한옥 전문가 자문을 통한 내실있는 기획

Ⅲ	전시 구성

전시계획 - 북촌한옥의 생활사가 살아있는 전시

○ 전시개요

- 전시대상 : 백인제家 사랑채, 안채 등 실내외 공간

- 전시주제 : 근대기 상류층의 거주 생활상, 백인제가와 서울 한옥 변천사

- 전시방안

∙ 장소(북촌), 건축(한옥), 과거주거생활이 융합된 전시콘텐츠 구성

∙ 사랑채, 안채, 별채 등 세부 생활상 복원 및 스토리텔링 개발

∙ 국내외 하우스 뮤지엄 벤치마킹을 통한 전시 기획 추진

○ 주요 공간별 전시내용(안)

구 분	전시주제	연출내용
안채 (안방,다락방,부엌)	북촌한옥 생활상	193-40년대 도시 한옥 생활상 재현 (거주 당시 모습 실재와 가깝게) 사계절 변화를 주면서 생활 조명
안채 (2층,대청)	백인제가 거주 인물의 생활상	한상용, 최선익, 백인제 등 거주자의 스토리텔링 개인의 삶보다는 거주자의 일상생활의 모습 조명
대문간채	백인제가 개요, 한옥 비교	한옥으로서 백인제가의 건축적 특성 전시 ‘백인제가’ 자체를 핵심 전시물로 활용하여, 전통한옥과 과도기 한옥양식의 비교․설명
사랑채	백인제가의 특징	사회적 교류공간으로서의 근대기 사랑공간 연출
별당채	백인제가의 풍류	북촌 풍광 조망 및 바둑 등 취미생활공간으로 조성

○ 내부연출(예시) - 전통식 가구, 서양식 가구가 혼재된 일제시대 서울 한옥

사랑방		안 방		사랑방가구		안 방 가 구

○ 전시 관람동선(안)

- 관람순서 : 대문간채 → 중문간채 → 안채마당 → 안채 → 사랑채 →

정원 → 별당채 → 별채 → 안채마당 → 중문간채 → 대문간채

Ⅳ	주요 추진 계획

백인제가 운영자문 위원회 운영

○ 위원구성 : 한옥보존, 고건축, 근대생활사 분야 전문가 5-6인

○ 운영기간 : 2015. 4 ～ 12

○ 자문내용

- 백인제가 운영방안 자문(개방 형태, 보존 방안, 전시▪교육프로그램 등)

- 각 영역별 전시연출 계획 자문

- 개관 이후 보완사항 자문

- 기타 백인제가 운영에 필요한 사항

전시 기본설계

○ 계약형태 : 설계 전문 업체와 소액수의 계약

○ 과업 내용

- 백인제가 생활공간 연출 기본계획 수립 및 연출지침 작성

▪대문간채, 중문간채, 사랑채, 안채, 별당채, 별채 안팎

- 목가구, 생활용품 등 전시물 설치에 관한 도면 작성

▪전시품의 구입 및 복제 여부 등 반영

- 백인제가 내 복원부분 기본 도면 작성 및 제안

▪사랑채 등 복원 공간

- 그래픽, 모형, 영상 등 종류별 전시물 배치안 설계

- 전시물, 설명패널, 기타 설치물 기획

- 조명, 음향, 영상 시스템 등 최적의 관람환경 유지 방안 반영

- 정보검색대 등 전시안내 시스템 설치도면 작성

- 원가계산서 및 산출기초조사서

▪전시연출 / 전시물 제작에 따른 세부 원가 계산서 및 산출기초조사서

- 기타 발주처에서 요구하는 사항

전시 연출 용역

○ 계약형태 : 제한경쟁 입찰

○ 과업 내용

- 백인제가 생활공간 연출 실시계획 수립

▪대문간채, 중문간채, 사랑채, 안채, 별당채, 별채 안팎

- 백인제가 실시설계 도면 작성

▪사랑채, 안채, 별당채 등 복원연출 공간

▪대문간채, 중문간채 등 전시 공간

▪대청마루, 누마루, 툇마루 등 인적교류 연출 공간

- 백인제가 생활공간 연출 전시 인테리어 공사

▪건축원형에 따른 망실부분 보완 공사

▪실제 생활상 복원에 필요한 도배 등 설치물관련 공사

- 목가구, 생활용품 등 전시물 구입 및 복원제작 설치

▪목가구류 : 사랑방, 안방, 자녀방, 손님방, 누마루, 부엌 등

▪생활소품류 : 193-40년대 서울 상류층 일상생활 소품류

- 설명패널, 그래픽패널 등 기타 설치물 디자인 제작 설치

- 전시 매체별 전시물 제작 설치

▪모형 분야 : 백인제가 모형, 북촌한옥모형 등

▪영상 분야 : 백인제가의 역사, 백인제가의 주인들 등

- 조명, 음향, 영상 시스템 등 제작 설치

- 정보검색대 등 전시안내 시스템 실시설계 및 제작 설치

- 기타 발주처에서 요구하는 사항

백인제가 주생활 전시관 상설도록

○ 계약형태 : 소액 수의 계약

○ 도록 내용

- 사진 : 백인제가의 한옥의 아름다움, 전시연출 공간 스케치 등

- 논고 : 백인제가 한옥의 특징과 건축사적 의의

Ⅴ	예산집행 계획

〇 소요예산 : 628,000천원

구 분	예 산 액 (단위 : 천원)	통계목	계약방식
전시 기본설계	22,000	시 설 비	소액수의 계약
전시 연출용역 (전시 실시설계, 전시물 구입 및 제작 연출, 그래픽, 모형, 영상 제작)	561,000	시 설 비	제한경쟁 입찰
자문회의비, 전시자료구입, 원고료 등	20,000	사무관리비	일상경비
사진도록 발간, 사진 촬영	27,000	사무관리비	소액수의 계약
총 계	628,000

※ 원고료 : <서울역사박물관 연구논문집 원고료 지급 기준>(서울역사박물관장 방침제105호, 2009.02.02)에 의거 원고 1매당 10,000원 지급

※소액수의계약은 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조1항5호(대통령령 제22638호 ; 2011.01.26) 및 지방자치단체수의계약운영요령(행정안전부예규 제331호2010.10.26.)에 의거

〇 예산과목 : 백인제가하우스뮤지엄조성, 일반운영비, 사무관리비(201-01) ․시설비 및 부대비 ․ 시설비(401-01)

Ⅵ	협조사항

○ 총  무  과 : 예산 및 행정지원

○ 시  설  과 : 전시공간 전기 및 조명 지원, 전시연출구역 안전유지 및 청소

○ 조사연구과 : 백인제가 관련 조사 콘텐츠 협조

○ 유물관리과 : 연출대상 유물 확보방안 협조

○ 보존과학과 : 전시대상 유물 보존처리, 백인제가 연출공간 온습도 점검

Ⅶ	추진 일정

2015. 4	전시추진계획 수립, 자문회의 개최, 전시 기본설계 계약
2015. 5	전시콘텐츠 협의, 외부기관 협의, 전시기본설계(계속)
2015. 6	전시연출 공고 및 수행업체 선정, 전시연출 협의, 전시연출물 수집 및 복제 제작, 전시원고 작성
2015. 7	전시시설물 및 연출 세부계획 확정
2015. 8	전시연출 추진, 전시보조물(그래픽, 영상, 모형 등) 설치, 보도자료 작성
2015. 9	백인제가 전시개막
2015. 10	전시보완 계획 수립
2015. 11～12	전시연출 보완 시행, 도록 발간

Ⅷ	성과지표

○ 10. 박물관 이용객 수

○ 13. 고객만족도

○ 18. 전시기획 및 운영