문서번호	생태공원과-920
결재일자	2015.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
석승우		최병언	04/10 장상규
협 조
	주무관			임이환
	주무관			서은교

한강 이촌권역 자연성 회복사업

기본 및 실시설계용역 준공 보고

공 원 부

(생태공원과)

한강 이촌권역 자연성 회복사업

기본 및 실시설계용역 준공 보고

우리본부에서 설계용역 추진한 ｢한강 이촌권역 자연성 회복사업 기본 및 실시설계용역｣의 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

용역개요

○  용 역 명 : 한강 이촌권역 자연성 회복사업 기본 및 실시설계용역

○  위    치 : 이촌한강공원(한강철교 북단 주변)

○  사업내용 : 자연형 호안 조성, 천변습지 및 논습지, 습지관찰대, 버드나무림 조성, 휴게쉼터, 다목적운동장 등

○ 용역기간 : 2014. 4. 29 ~ 2015. 3. 31

○ 용 역 비 : 231,297천원

○ 용역기관 : 동부엔지니어링㈜, ㈜유신

추진경위

○ 2014.  4. 29 : 설계용역 착수

○ 2014.  5. 22 : 1차 전문가 설계자문 (한봉호 교수)

○ 2014.  8. 22 : 2차 전문가 설계자문 (한봉호 교수, 이삼희 박사)

○ 2014.  9. 26 : 기본구상(안) 보고

○ 2014. 11. 12 : 한강시민위원회 본회의 자문(11차)

○ 2014. 12. 29 : 하천점용허가 신청

○ 2015.  2.  2 : 최종보고회 개최

○ 2015.  3.  6 : 한강시민위원회 본회의 자문(12차)

○ 2015.  3. 12 : 설계경제성(VE) 심사 (결과 통보)

○ 2015.  3. 20 : 설계내용 및 추진사항 보고 (서왕진 정책특보)

○ 2015.  3. 31 : 설계용역 준공

○ 2015.  4.  6 : 한강시민위원회 본회의 자문(13차)

○ 2015.  4.    : 한강시민위원회 소위원회 자문 (예정)

○ 2015.  4.    : 공사 발주 (예정)

준공내역

○ 공 정 율 : 100%

○ 준공금액 : 금231,297,000원

○ 기지급액 : 금208,167,000원

○ 지급잔액 : 금23,130,000원

○ 납품도서 : 설계보고서, 유지관리지침서, 설계예산서, 설계도면 등

조치계획

○ 상기와 같이 기본 및 실시설계용역이 완료되었으므로 준공 조치

○ 향후 한강시민위원회 소위원회 자문의견 반영하여 계약심사 의뢰 및 공사 발주 조치

붙임 : 기본 및 실시설계용역 기성검사 사진대지 1부.  끝.