문서번호	소방행정과-4453
결재일자	2015.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
이용	이문성	이재호	04/10 장현태
협 조

- 공사현장 여건변동에 따른 설계제외 및 직원편의를 위한 -

현장대응단 사무실 재배치 및 식당환경개선 공사 설계변경 실정보고

2015.  04.

현장 여건변동에 따른 설계제외 및 직원편의를 위한

현장대응단 사무실 재배치 및 식당등 환경개선 공사

설계변경 실정보고

현장대응단 사무실 재배치 및 식당등 환경개선공사 진행중 3층 3과 사무실 등 천장철거로 인한 경량철골(M바) 등 손실 및 물량증가에 따른 설계변경 실정보고에 대하여 다음과 같이 검토하고자 함

Ⅰ		공사개요

공  사  명 : 현장대응단 사무실 재배치 및 식당등 환경개선공사

사업대상

부 서 명	위 치	건 물 개 요			준공년월일	외부마감
		층수	연면적(㎡)	대지면적
서대문소방서	서대문구 연희로 182	4/1층	4,903.34	2,439.00	2006. 2. 9.	대 리 석

사업기간 : 2015년 3월 4일 ~ 2015년 4월 13일(29일)

시 공 자 : ㈜삼구아이앤씨 대표 구자관

공사개요

- 현장대응단 사무실 재배치

- 본서 식당 환경개선공사  63.75㎡ 내부 인테리어등

- 1층 휴게실 7.2㎡ 내부 인테리어

- 3층 각과 사무실 벽체 철거 및 강화유리 설치

- 예방과 민원실 안내데스크 설치

- 홍은119안전센터 샤워실 락커 설치 등

- 미근119안전센터 식당 주방기구 설치 등

- 기타 도색 등 환경개선공사

Ⅱ		실정보고사항

관련근거

- ㈜삼구아이앤씨 15-04-09(2015. 04. 09.)호『설계변경 검토의 건『서대문소방서 현장대응단 사물실 재배치 및 식당등 환경개선 공사』제출

- ㈜산성건축사사무소 2015-01(2015. 04.10.)호『설계변경 발생에 따른 설계자

의견 제출

변경요청사항

공 종	변 경 전	변 경 후
가설공사	•증감없음	•증감없음
미장공사	•기존몰탈바닥바르기 20.9㎡	•1,3층몰탈바름물량증가 40㎡ 19.1㎡증가
금속공사	•경량철골틀 57.2㎡	•3층,1층경량철골틀 177.8㎡ 120.6㎡증가
타일공사	•기존타일붙임 7.8㎡	•타일붙임미실시 7.8㎡감소
창호공사	•통로와내부 단차로인한 창호물량증가	•ＳＳＤ1 내부창호높임 58.1ｍ증가
유리공사	•강화유리 107.2㎡	•강화유리 101.92㎡ 5.28㎡감소
도장공사	•증감없음	•증감없음
수장공사	•기존데코타일263.7㎡, 폴리싱타일78.3㎡	•데코타일467.25㎡ 203.55㎡증가, 폴리싱타일78.3㎡감소
목공사	•증감없음	•증감없음
기타공사	•에어콘배관연결 60ｍ	•에어콘배관연결 140ｍ 80ｍ증가
철거공사	•폐자재소운반 설계누락	•폐자재소운반 43.2㎥ 43.2㎥증가
골재대	•모래1㎥, 시멘트6포	•모래2㎥ 1㎥증가, 시멘트12포 6포증가
폐기물처리비	•증감없음	•증감없음

Ⅲ		예산현황

현장대응단 사무실 재배치 및 식당등 환경개선공사

(단위:천원)

구 분	예산현액 (A)	발주금액 (B)	발주잔액 (A-B=C)	계약금액 (D)	낙찰차액 (B-D=E)	집행잔액 (C+E=F)
시 설 비	131,228	125,950	0	110,167	15,783	16,110

설계변경 소요예산(가격산정기준 계약내역 단가적용금액)

(단위:원)

공 종	변 경 사 유	변 경 전	변 경 후	증 ․ 감	비 고
계		110,167,520	124,072,237	13,904,717
가설공사	•증감없음	1,461,911	1,461,911	0
미장공사	•1,3층 벽바름으로인한물량증가	241,724	462,629	220,905
금속공사	•경량철골틀 철거물량증가	1,402,982	3,970,494	2,567,512
타일공사	•타일붙임 미실시로인한물량감소	177,858	0	-177,858
창호공사	•통로와내부 단차로인한 창호물량증가	17,570,296	17,942,422	372,126
유리공사	•1층창호 축소로인한 물량감소	8,667,589	8,387,599	-279,990
도장공사	•증감없음	2,007,995	2,007,995	0
수장공사	•마감재변경및 1,3층벽마감으로인한물량증가	23,836,395	27,183,876	3,347,481
목공사	•증감없음	884,549	884,549	0
기타공사	•시스템에어콘 배관연결 물량증가 •통신박스 3개 및 점검구 18개 물량증가	24,435,646	25,955,905	1,520,259
철거공사	•폐자재소운반 물량증가	4,129,503	7,254,108	3,124,605
골재대	•미장공사 수량증가로인한 물량증가	41,713	83,427	41,714
폐기물처리비	증감없음	3,199,032	3,199,032	0
소 계		88,057,193	98,793,937	10,736,744
재경비		22,110,327	25,278,300	3,167,973

계약금액 변경

변경전 계약금액	증감내역	변경후 계약금액	단가산출기준
110,167,250원	13,904,987원	124,072,237원	계약내역 단가 및 요율적용(낙찰율 적용)

Ⅳ		검토 및 처리의견

금속공사

- 건축물의1,3층 철거과정중 설계누락에 의한 천정 M바등 물량증가에 따른 변경 필요

수장공사

- 3층 78.3㎡기존 폴리싱 타일로 설치를 데코타일 변경과정에서203.55㎡증가   에 따른 변경 필요

기타공사

- 시스템에어컨 통신박스 및 점검구 이설등 물량 증가

철거공사

- 폐자제 소운반등 물량 증가

검토의견 : 승인(현황실정보고 내용)

- 상기와 같이 설계변경에 대하여 현장대응단 사용자들의 의견 반영 및 향후 관리유지         등 편리성을 감안 실정보고사항에 대하여 검토한 바, 설계변경 시공하는 것이 적정        하다고 판단되어 승인처리 하고자 함.

- 설계변경에 소요되는 예산은 공사입찰시 발생된 낙찰 차액으로 사용

- 소방업무 특성상 24시간 상주 근무여건을 감안 직원들의 불편사항 해소를 위한 조기 준공예정임을 감안 선 시공 통보하고 변경계약 등 행정절차에 대하여는 차후 시행 하고자 함.

계약기간연장 : 변경전 : 2015.3.4 ~2015.4.13.(월)

변경후 : 2015.3.4. ~ 4.17(금)까지(4일연장)

붙임 1. 건축물 변경도면 1부.

2. 설계변경 관련 공문 2부. 1부.  끝.