문서번호	시설과-1455
결재일자	2015.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장
최지효	04/10 진병규
협 조
	주무관		이전호
	주무관		백운도

보라매공원 데크 쉼터 및 산책로 정비계획

2015. 4.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

보라매공원 데크 쉼터 및 산책로 정비계획

보라매공원 내 노후된 데크 쉼터 및 산책로를 보수하여 안전하고 쾌적한 공원관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		데크 설치 현황

❍ 총 면 적 : 약 8,848㎡

❍ 설치현황

설치위치	설치년도	면적(㎡)	목재규격	목재종류
잔디광장주변 숲길 (보행 및 전망데크)	2007	2,406.93	T50×W150	미송방부목
연못전망대	2007	219.00	〃	〃
와우산 숲관찰로	2008	400.83	T40×W150	〃
북동산 산책로 (보라매병원 뒤)	2010	5,348.61	T120×W200	〃
독서쉼터	2013	413.05	T38×W140	하드우드(이페)
향기원 데크쉼터	2014	60.00	T30×W155	하드우드(부켈라)
계		8,848.42

❍ 관리상 문제점

- 잔디광장주변 데크 쉼터 및 산책로가 노후되어 공원이용자 안전사고 위험에 노출 (부서짐, 발빠짐 등)

- 현황사진

⇒ 이용객이 증가하는 봄철 안전사고 예방을 위해 노후된 목재 교체 긴급 보수 필요

Ⅱ		데크 정비 계획

❍ 정비대상 : 잔디광장주변 숲길 데크 쉼터 및 산책로

❍ 기 보수이력

- 보수면적 : 326㎡

□2013 : 160.2㎡ (보라매공원 정비공사에 반영, 낙엽송)

□2014 : 165.8㎡ (보라매 무장애 친화공원 조성공사에 반영, 부켈라)

- 잔여면적 : 2,080.93㎡

❍ 추진방법 : 목재를 구매하여 자체인력으로 보수․정비

- 일반 방부목(미송, 낙엽송)에 비해 내구연한이 길고 뒤틀림이 적은 하드우드(부켈라)로 구매하여 보수

❍ 문제점 및 대책

- 수입목 통관 절차 등으로 하드우드(부켈라) 수급 일정 지연(5~6월경 가능)

- 국내 잔여 물량을 우선 구매하여 긴급 보수하고 수입목 국내 반입 완료 후 추가 구매

Ⅲ		구 매 계 획

❍ 건    명 : 보라매공원 데크 보수자재 구매

❍ 구매내용 : 하드우드(부켈라) 75개

- 판재(T50×W150×L3600) : 70개

- 각재(T100×W100×L3000) : 5개

❍ 구매방법 : 부서 법인카드 결재 후 카드결제계좌 입금

***********************

❍ 구매업체 : **********

- 소 재 지 : ***********************

❍ 납품기한 : 구매일로부터 7일이내

❍ 소요예산 : 4,936,800원

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원녹지관리 수준향상, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 재료비

Ⅲ		향 후 계 획

❍ 4. 13 : 구매 시행

❍ 4. 20 : 납품 완료, 물품 검수 및 대금 지급

❍ 4. 21 ~ : 자체인력으로 긴급 보수 시행

붙임 : 1. 산출기초조사서(견적서, 사업자등록증, 소상공인확인증 포함) 1부.

2. 서울특별시 청렴계약 이행서약서 1부.

3. 수의계약 사유서 1부.

4. 녹색상품 구매적용가능 검토서 1부.  끝.