투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	국세청 남대문별관 석면해체제거 감리용역 변경계약의뢰

우리본부에서 시행 중인 『국세청 남대문별관 석면해체제거 감리용역』과 관련하여 아래와 같이 계약변경 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 사업개요

가. 용 역 명 : 국세청 남대문별관 석면해체제거 감리용역

나. 계 약 자 : 로스피코리아

다. 계약금액 : 3,200,000원

라. 계약기간 : 2015.03.023 ~ 2015.04.11.

변 경 전		변 경 후		비 고
기 간	금 액(원)	기 간	금 액(원)
‘15.03.23 ~ ’15.04.11	3,200,000	‘15.03.23 ~ ’15.05.01	좌 동	증) 20일

마. 연기사유 : 문화재 현상변경 및 소유권 이전 결정 지연 등으로 인해 석면해체제거공사가 착수되지 않아 감리기간 연장 필요

바. 귀책소재 : 우리본부

따로붙임 : 기간연장 보고서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	이광백		환경시설과장	신명승		건축부장	04/10 김우성
협조자	경리과장	代김용범
시행	건축부-4116	(		)	접수		(		)
우	100-170	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2619	/전송	02-3708-2659	/	nepdo@seoul.go.kr	/	대시민공개