문서번호	고도정수반-2154
결재일자	2015.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		고도정수반장
라승보		전결 04/10 김인규
협조
	주무관		송병욱

「구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사」

계약금액 조정 소위원회 개최 계획

2015. 4.

시설안전부

(고도정수반)

구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사(6차)

계약금액 조정 소위원회 개최

□ 사업개요

○ 공사규모 : 재건설(표준정수) 25만톤/일, 고도정수 45만톤/일(총 시설용량 50만톤/일)

○ 공사기간 : 2014. 1. 8. ~ 2015. 4.20. (도급비 : 51,949백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대우건설, ㈜두산건설, ㈜이화공영

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술, ㈜동일기술공사

□ 계약금액조정 소위원회 개최

○ 일  시 : 2015. 4.10(금) 15:00(4층 시설안전부 회의실)

○ 위  원

- 위원장 : 고도정수반장

- 위  원 : 시설과   시설6급 이용구,

시설7급 정연준 ‧ 문현수 ‧ 이승언

□ 계약금액조정 근거

○ 공사계약 특수조건 제26조(설계변경 등)제2항 3호 “ 공사관련 법령의 제‧개정이 있어 발주기관이 변경시공을 지시한 경우”에 의거 설계변경 조치 및 계약금액 조정 요청

□ 심의내용

○ 건물명칭 및 아리수 홍보간판 설치

- 변경사유 : 정수센터 요청에 의한 발주청 지시

‣ 홍보안내판 설치요청 (구의정수센터 행정관리과-2755, ’15. 4. 3.)

‣ 본 공사에 추가하여 설치토록 업무지시(고도정수반–2065, ’15. 4. 7.)

- 변경내용

변경내용	설치구간	설치 조감도
건물명칭 설 치 (2개소)	관리본동, 교육관
홍보간판 설 치 (2개소)	본관정문, 교육관정문

- 공사비 검토

‣ 단가산출방법 : 견적

단위 : 원

구 분	금 액		증‧감	비고
	당초	변경
순 공사비계	-	10,909,892	10,909,892
제 경 비	-	1,020,108	1,020,108
총원가	-	11,990,000	11,990,000
부가가치세	-	1,199,000	1,199,000
공 사 비 계	-	13,189,000	13,189,000

□ 행정사항

○ 계약금액 조정 결과 반영하여 설계변경 시행.

첨부 : 1. 계약금액 조정 심의 요청 공문 사본 1부.

2. 계약금액 조정 심의 내역서 각 1부. 끝.