문서번호	시설과-1493
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	임록화	진병규	04/13 이춘희
협 조

『서울가정행정법원 등 3개소』

건축물 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역 완료보고

2015.04

동부공원녹지사업소

시설과

『서울가정행정법원 등 3개소』

건축물 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역 완료보고

서울가정행정법원 등 3개소 건축물 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역이 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

□ 용역 개요

○ 용역명 : 서울가정행정법원 등 3개소 건축물 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역

○ 대상지 및 규모

시 설 명	위 치	사업비 (백만원)	옥상녹화 신청면적 (㎡)	구조안전 진단면적 (㎡)	비고
합 계	3개소	506.5	1,447	1,928.6
서울가정행정법원	서초구 강남대로 193	290	829	876.6
서울시보건환경연구원	과천시 장군마을 3길 30	87.5	250	656
반포수난구조대	동작구 동작대로 335-1	129	368	396

○ 용역기간 : 2015. 03. 18  ～  04. 08

○ 도 급 자 : ㈜비디이엔지 대표 조성구

○ 도 급 액 : 15,665,000원

□ 용역 결과

○ 구조안전진단 결과 옥상녹화 제안

시 설 명	구조물 평가등급	구조안전 진단결과 녹화가능 제안 유형(㎡)					비고
		초경량형	경량형	혼합형	중량형	계
서울가정행정법원	A	-	264.5	607.6	4.5	876.6
서울시 보건환경연구원	B	306	270	80	-	656
반포수난구조대	A	-	396	-	-	396

○ 용역 중간 보고결과 조치사항

- 슬래브·보·기둥의 각 위치별 구조 안전성 재검토 하여

- 서울 가정행정법원 1개소 4.5㎡ 중량형 옥상녹화 제안

- 서울시보건환경연구원 경량형 제안구간 중 일부구간 306㎡를 초경량형         으로 변경제안

○ 옥상녹화 시공시 보완사항

- 서울가정행정법원

· 옥상 일부 방수층 및 파라펫 균열이 발견 되어 옥상녹화 공사전 해당 구간                  보수 작업 필요

· 현 옥상 배수 성능은 양호 하나 옥상녹화 조성 후 지속적인 배수 드레인 점검 필요

- 보건환경연구원

· 옥상녹화 공사전 기존 방수층 철거 및 결함 발생 유무 확인후 방수 공사 필요

· 현재 난간 높이가 약1.2m로 옥상녹화 토심 증가에 따른 안전 난간 보완 필요

· 현 옥상 배수 성능은 양호 하나 옥상녹화 조성 후  지속적인 배수 드레인 점검 필요

- 반포수난구조대

· 현 옥상층 바닥 마감 박리 및 표면 녹 발생에 따라 옥상녹화 공사전 해당                    구간 보수 작업 필요

· 계단실 출입구 턱이 낮아 방수턱 시공 필요

· 현 난간 높이가 약1.2m로 옥상녹화 토심 증가에 따른 안전 난간 보완 필요

· 현 옥상 배수 성능 다소 부족하여 배수 드레인 추가 또는 직경 확대 필요

· 현 대상지는 물위에 떠있는 선박구조로 구조안전진단 결과에 따른 옥상녹화 계획시            선체의 안전성 확보 여부에 관해 선박관련 전문기관 및 선박안전 기술공단 검토 필요

□ 향후 계획

○ 구조안전 진단 유형 결과에 따라 실시설계 용역 실시

○ 실시설계 용역이 구조안전진단 결과에 따라 적정 하게 설계되었는지       검토 의뢰

○ 반포수난구조대(바지선 고박형)는 선박안전 기술검토에 따른 추가         경비가 지출되므로(약10백만원) 조경과(市)와 협의 하여 진행

□ 향후 추진 일정

○ 2015. 04 :  조경과(市) 협의(반포수난구조대)

○ 2015. 04. ~ 06 : 실시설계 용역 발주 및 시행

○ 2015. 07. ~ 10 : 공사 발주 및 시행. 끝.