문서번호	정수시설과-1216
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이덕종		代김향석	04/13 박기석
협조
	정수과장		임건혁

여과지 역세척용 밸브조작기 개량

계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

여과지 역세척용 밸브조작기 개량 계획 보고

2015년도 『여과지 역세척용 밸브조작기 개량』사업과 관련 장기간 사용에 따른 노후로 성능이 저하된 설비를 신속히 교체하여 양질의 수돗물 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 현황

○ 시설현황

품명	규격	총댓수	설치년도	용도
공기밸브	공압식,￠350	56 (계열별14대)	1997년	역세척용
역세밸브	공압식,￠600	56 (계열별14대)	1997년	역세척용
정수밸브	공압식,￠500	56 (계열별14대)	1997년	역세척용

□ 사업개요

○ 대상 : 여과지 2계열

○ 사업내용 : 공압식 밸브를 전동식 밸브로 개선

○ 규모

- 공기변 개량 : 전동식 BFV￠350 14대

- 역세변 개량 : 전동식 BFV￠600 14대

- 정수변 개량 : 전동식 BFV￠500 14대

- 전기설비 등 기타 부대설비

○ 사업기간 : 2015. 3. 2 ~ 2015. 7. 30

□ 추진계획

○ 현장조사 및 설계 : 2015. 4. 10까지

○ 발주 및 계약     : 2015. 4. 13 ~ 2015. 4. 30

○ 착공 및 교체작업  : 2015. 5. 1 ~  2015. 7. 25

○ 시운전 및 준공처리 : 2014. 7. 30까지

□ 예산 및 발주방법

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비

○ 예산현액 : 384,000천원

○ 사업내용

- 밸브구매비(전동식 버터플라이밸브)    : 290,000천원

- 공사비(여과지 역세척용 밸브 개선공사):  94,000천원

○ 발주방법

- 밸브구매 : 『여과지 유입 및 퇴수설비 개량』사업에 소요되는                           밸브와 함께 조달구매(MAS 2단계 경쟁, 2015.3.20)

- 공사  : 전기공사와 분리해서 발주(일반경쟁입찰)

· 기계공사(철거설치비) : 44,000천원

· 전기공사(판넬, 배관 및 배선비) : 50,000천원

□ 기타 행정사항

○ 철거품 고재처리

기존 철거품인 공압식 밸브등은 재활용이 불가하여 본 개량사업시 내역에 고재처리를 계상반영처리하여 깨끗하고 효율적인 개량사업을 완료하고자 함.  끝.