문서번호	고도정수반-2213
결재일자	2015.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		고도정수반장	시설안전부장
라승보		김인규	04/13 강신재
협 조
	주무관			송병욱

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 폐기물처리용역』

건설폐기물 정산변경 실정보고에 대한 검토

2015. 4.

상수도사업본부

(고도정수반)

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 폐기물처리용역』

건설폐기물 정산변경 실정보고에 대한 검토 보고

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사』에서 발생되는 폐기물의 실제 처리수량을 반영한 (최종)설계변경서에 대한 검토 보고임.

※ 관련문서 : 구의CM 제2015-123호(2015. 4. 7.)

용역개요

○ 용 역 명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 건설폐기물처리용역

○ 용 역 사 : 대길환경산업㈜ 조정기

○ 용역기간 : ’14.02.04.  ～  ’15. 4.20.(총차분 : ’12.04.06.  ～  ’15. 4.20.)

○ 용 역 비 : 655,066,700원(금차분 372,456,170원)

○ 계약수량 : 운반 및 처리 49,978톤

(아스콘 3,461, 콘크리트 37,280, 혼합 5,379톤)

계약현황

구 분		단위	총 차	차 수 별			비고
				1차(준공)	2차(준공)	3차(진행중)
처리량	폐아스콘	톤	3,461	1,191.64	296.71	1,972.65
	폐콘크리트	톤	37,280	18,722.74	1,567.36	16,989.90
	혼합폐기물	톤	5,379.18	171.28	61.92	5,145.98
용 역 비		천원	655,067	257,223	25,388	372,456
용역기간			'12.04.10 ~ '15.04.20	'12.04.10 ~ '12.12.28	13.02.01~ '13.12.31	'14.02.04 ~ '15.04.20

설계변경 현황

○ 변경사유

- 현장여견 변동에 따른 건설폐기물 발생 성상 및 수량 변동

○ 변경현황(용역비 감 138,507천원)

구 분		단위	총괄분		3차분		증‧감
			당초	변경	당초	변경
처리량	폐아스콘	톤	3,461	2509.00	1,972.65	1,020.65	감)952
	폐콘크리트	톤	37,280	27,179.27	16,989.9	6,889.17	감)10,101
	혼합폐기물	톤	5,379.18	5,460.48	5,145.98	5,227.28	증)81.3
	소 계		46,120.18	35,148.75	24,108.53	13,137.1	감)10,971
용 역 비		천원	655,067	516,560	372,456	233,949	감)138,507

조치의견

○ 위 사항에 대하여 변경계약 의뢰코자 함.

계약의뢰처 : 본청 재무국 재무과

붙임 : 건설폐기물 처리용역 정산변경 실정보고 및 내역서 각1부. 끝.